문서번호	환경수질과-6217
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
한미라		代한미라	10/30 송영민
협조

수해쓰레기 운반용역 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

한강사업본부

(운 영 부)

수해쓰레기 운반용역 설계변경 보고

수도권매립지에 수해쓰레기 처리하기 위한 「수해쓰레기 운반용역」 계약에 대하여 용역이 완수되었기에 최종물량을 정산하여 설계변경코자 함

1

개 요

○ 용 역 명 : 수해쓰레기 운반용역

○ 용역개요 : 수해쓰레기(수초류)를 처리를 위하여 수도권매립지에 운반

○ 업 체 명 : 평아기업 주식회사 대표 구진회

○ 계약기간 : 2020. 9. 1. ~ 10. 30.

○ 계약물량 : 600톤

○ 계약금액 : 금20,100,000원(금이천일십만원)

2

변경사항

○ 변경사유 : 예정물량 산정으로 계약한 사업으로써 용역완수한 최종물량에 대한 근거 자료로 정산하여 설계변경

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
계약금액(원)	20,100,000	19,445,410	감654,590원	톤당단가 33,500
물량(톤)	600	580.46	감 19.54톤

붙임  1. 폐기물 운반내역(9월, 10월) 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.