코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	지출품의결재요청(정세권 전시관 조성공사 감리용역 증액)

1. 「정세권 전시관 조성공사 감리용역」의 변경계약(증액)금액 지출품의를 승인하여 주시기바랍니다.

가. 용 역 명 : 정세권 전시관 조성공사 감리용역

나. 당초계약금액 : 금6,985천원

********************

라. 당초계약기간 : 2020. 7. 3. ~ 2020. 11. 9.

*************************

바. 계약상대자 : ㈜구가도시건축 건축사사무소(대표 조정구)

사. 준공기한 연기 및 설계변경 사유

- 건축․전기공사 추가물량 및 공기연장에 따른 감리업무 추가기간 반영

- 현장방문 및 업무수행 비용 추가 반영

아. 예산과목 : 도시재생실 한옥건축자산과, 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전(일반), 한옥지원센터 운영 및 한옥 유지보수 지원, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 도시재생실 한옥건축자산과)

주무관							김현우			건축자산지원팀장					최장길					한옥건축자산과장					10/30 신동권
협조자
시행			한옥건축자산과-10697									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)