투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「서울숲 공원 사인물 정비공사」설계변경(1차) 시행 및 계약변경 의뢰

1. 시설과-3355(2020.10.29.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『서울숲 공원 사인물 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울숲 공원 사인물 정비공사

나. 도 급 액 : 금136,432,980원

다. 공사기간 : 2020. 08. 20  ~ 11. 06

라. 도 급 자 : 대한종합조경(주)  이일흔

마. 도급비 변경내역

(단위 : 천원)

구 분		금액(천원)		변경	비 고
		당 초(도급)	공사비 증감
			금회(1차)
총 공 사 비		217,457	-19,358	198,099
도급비	순공사비	94,287	2,142	96,429
	제경비	42,146	630	42,776
	도급액	136,433	2,773	139,205
관급자재비		81,024	-22,130	58,894

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

사. 공사기간변경 : 없음

붙  임 : 1. 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 각1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	하종식		시설과장	10/30 代하종식
협조자
시행	시설과-3366	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)