	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	망우119안전센터 재건축 공사 변경계약체결 결과

1. 관련근거

가. 소방행정과-3074(2020.3.23.)호 「망우119안전센터 재건축 소방공사 계약체결 결과」

나. 시 재무과-17394(2020.3.31.)호 「계약체결 알림(중랑소방서 망우119안전센터 재건축 통신공사)」

다. 소방행정과-3579(2020.4.6.)호 「망우119안전센터 재건축 공사 감리용역 체결 결과」

라. 시 재무과-19182(2020.4.7.)호 「계약체결 알림(중랑소방서 망우119안전센터 재건축 전기공사)」

마. 시 재무과-19546(2020.4.8.)호 「계약체결 알림(중랑소방서 망우119안전센터 재건축 종합공사)」

바. 소방행정과-9796(2020.10.29.)호 「망우119안전센터재건축 건축․기계분야 공사 변경계약 계획보고」

사. 소방행정과-9797(2020.10.29.)호 「망우119안전센터 재건축공사 전기 등 공종별 계약기간 변경계약 보고」

2. 망우119안전센터 재건축 공사 관련 건축․기계 및 각 공종별 계약기간 연장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 망우119안전센터 재건축 공사 변경계역체결

나. 내    용 : 건축․기계 공사 계약기간 연장에 따른 각 공종별 준공기한 조정

다. 결    과 : 건축․기계 및 각 공정별 변경계약체결

구분	계 약 기 간		비고
	변경 전	변경 후
건축․기계	2020.04.07. ~ 11.02.	2020.04.07. ~ 11.30.
전기․통신․소방	2020.04.07. ~ 11.12.	2020.04.07. ~ 11.30.
감리	2020.04.07. ~ 11.12.	2020.04.07. ~ 12.06.

붙임  각 공종별 변경계약서 5부.  끝.

담당자	오승민		장비회계팀장	공병렬		소방행정과장	조경현		소방서장	10/30 최성희
협조자
시행	소방행정과-9840	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화		/전송	02-3423-3911	/		/	부분공개(5)