문서번호	도시철도사업부-10625
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
국성훈		최문기	10/30 이철
협 조
	주무관			박형복
	주무관			이덕배
	주무관			정영호
	주무관			원길묵

- 신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2,3공구) -

휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 검토 보고('20년 11월)

2020. 10.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 검토 보고('20년 11월)

신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구) 관련 ´20년 11월 휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 요청(2,3감리)에 대하여 검토 보고 드림

□ 휴일 및 야간 근무 승인 요청내용

□ 관련 근거 : 신림선(2공구)2020-330호('20.10.28.) … #붙임1

□ 휴일 근무 : 총 8일

- 11.1.(일), 11.7.(토), 11.8.(일), 11.14.(토), 11.15.(일), 11.21.(토), 11.28.(토), 11.29.(일)

□ 야간작업 : 11.2.~11.30.(미시행 : 매주 토․일요일)

□ 휴일 및 야간 근무 계획

□ 관련근거

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제3장 제5절 4.0 (휴일 및 야간작업)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.2 (휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.3 (휴일 및 야간작업 근무 요령)

□ 휴일 및 야간 근무 사유

- 원활한 공정 추진 및 연속적인 작업시행을 통해 작업공간 확보

- 주변 유동인구수 최소 시간을 감안하여, 작업을 신속하게 추진해 시민불편 해소에 만전

□ 적정성 및 비용 부담

【휴일 근무】

- 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681호, '13.11.14.)

□휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇨ 시공사 귀책은 시공사에서 대가 지급

- 감리단 검토 의견

□휴일작업 사유 : 시공사 귀책으로 인한 휴일근무 임을 명기(시공사)

【야간 근무】

- 야간근무는 주․야간으로 산출된 공사비에 의거 감리대가를 산출하였으므로 추가지급 제외 (입찰안내서 제6장 6.2.1)

- 용역계약일반조건 Ⅴ.4.나 항목 단서조항에 의한 작업일 경우 감리원은 대체휴무하고 근로기준법에서 정한 1.5배의 기준은 적용하지 않음

□용역계약일반조건 Ⅴ.4.나 : 계약상대자는 발주기관과 협의하여 야간작업을 하는 경우 추가비용을 청구할 수 없음

□ 휴일 및 야간 근무 주요내용 : 별첨 … #붙임2

□ 개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수 : 적정 … #붙임3

□ 검토 결과

□ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 및 야간작업 승인 조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무 계획을 승인코자 함

< 건설사업관리기술자 휴일 및 야간작업 승인 조건 >

- 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담

- 야간작업에 소요되는 건설사업관리기술자 추가 대가 제외

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 소음․먼지․통행 불편 등 민원사항이 없도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의할 것

- 휴일작업 시행 전 세부 작업계획을 수립하고 공사 관리의 공백이 없도록 공사 관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 공사장 조도 확보, 작업장 정리정돈 등을 실시하여 안전관리 강화 철저 추진

- 동절기 도래 대비 한중 Con’c 타설 대책을 사전에 수립하여 품질관리 철저 당부

- 본부 안전관리과에서 안전사고 위험 현장 지적․안내와 관련하여 지적사항은 즉시 조치하고, 반복 지적되지 않도록 현장관리 요망

- 감염병 위기 단계의 ‘심각’ 단계에 따라 코로나 19 예방 및 지역사회 확산 방지를 위한 ‘건설공사장 대응 지침’ 숙지 및 이행 철저

- 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 ‘사회적 거리 두기 지침’ 이행 철저

- 건설공사장내 노출된 상수도관 등 지하매설물 관리 철저

- 건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 건설사업관리기술자 및 현장 공사 관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공 상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 및 야간 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 사고 발생 시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

- 안전관리자 정위치 및 취약시간 관리 철저

- [근로자 안전 10계명], [안전시공 10대 항목] 준수 철저

붙  임 : 1. 휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 요청 공문 1부
2. 휴일 및 야간 근무 주요 내용 1부
3. 11월 감리원 근무 계획(주 52시간 준수)
4. 코로나19 확산방지를 위한 건설공사장 대응 지침 1부
5. 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 사회적 거리 두기 지침 1부.  끝.