문서번호	수상안전과-4786
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	수상안전과장	운영부장
최윤정	윤재한	11/02 송영민
협 조	총무과장		이상이
	기획예산과장		문영일

「한강아라호 정기검사를 위한 수리 용역」

추가 수리를 위한 변경(금액) 계획

2020. 11.

한강사업본부

(수상안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한강아라호 정기검사를 위한 수리 용역

추가 수리를 위한 변경(금액) 계획

한강아라호의 선박안전법에 따른 정기검사와 관련하여 검사관의 지적사항에 따라 추가 수리를 실시하여 검사에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

용역현황

○ 용 역 명 : 한강아라호 정기검사를 위한 수리 용역

○ 용역내용 : 한강아라호의 정기(상가)검사를 위한 수리

○ **************************************

○ ************************

○ 착 수 일 : 2020. 9. 21.

○ 준공기한 : 2020. 9. 21. ~ 2020.11.10.

검사개요

○ 검사대상 : 한강아라호

선명	선체규모(m) (길이, 폭, 깊이)	톤수	속도	승선정원	건조일
한강아라호	55.5 x 12 x 2.5	688톤	10노트	310명	’10.10.20.

○ 검사기관 : 한국선급(KR), 서울지부

- 선체 임상섭, 기관 김철웅 검사관

○ 관련법령 : 선박안전법 제8조(정기검사, 상가검사)

□ 추진사유

○ 선체검사 시 검사관의 지적사항에 따른 수리

○ 기관검사 시 검사관의 지적사항에 따른 수리

○ Bow thruster 누유 및 손상 발견되어 수리 및 육성 가공 필요

○ 안전 및 원활한 작업을 위한 방진막 추가 설치 및 발전기 필요

Ⅱ		추 진 계 획

□ 추가 수리 내역

○ 선체검사 시 지적사항에 따른 수리 내역

- 선저 senser putty 보강 및 글라인딩

- 우현 핸드레일 & stanchion 곡직, 신환

- seachest 양현 아연판 교환

- upper(선수) & partial deck(통로) 데크 수리

- 차양막 보강 등

○ 기관검사 시 지적사항으로 인한 수리 내역

- 양현 외부 비상등 설치

- G/S펌프, 소방펌프, FO펌프 개방 및 수리, 베어링 교환

○ Bow thruster 누유 및 손상에 대한 수리 내역

- bow thruster 개방수리 및 seal 교환

- bow thruster 스크류 풀리싱

- bow oil 쿨러 커플링 B/N 교환

- bow thruster 하우징 육성 용접

□ 추가 소요 비용

○ 예산과목 : 한강공원 등 운영 및 관리, 시설비(100-401-01)

○ 소요비용 : 금29,730천원(부가세 별도)

구 분	소 요 예 산	산 출 내 역
*	********
*** *****	********	************************ ************************** ***************************** ************************
*** *****	*********	****************************
************	*********	***************************
**	*********	************************

□ 추진일정

○ 산출내역 작성 및 계약 변경 의뢰  : ~ 2020. 11. 03.

○ 선체, 기관 및 추가 수리          : ~ 2020. 11. 05.

○ 아라호 하가 및 시운전              : ~ 2020. 11. 05.

Ⅲ		행 정 사 항

□ 예산 재배정 및 지출 : 2020.11.03. ~ 2020.11.10.

□ 설계변경 의뢰 : 총무과

붙임  계약서, 추가 견적서 각 1부.  끝.