“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

우리사업소에서 시행하고 있는『금천1 및 낙성대1 중블록 무단수 급수체계 구축공사』

에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 금천1 및 낙성대1 중블록 무단수 급수체계 구축공사

나. 계약업체 : 동양환경엔지니어링(주) 대표 최동안

다. 계약금액 : 695,566,820원

라. 준공기한 연기내역

1) 공사기한 : 당초 2020. 5. 7. ~ 2020. 11. 6.

변경 2020. 5. 7. ~ 2020. 12. 17.(42일 연기)

2) 연기사유 : 우천 작업대기 및 각종 협의로 공사중지로 절대공기 부족

3) 귀책소재 : 남부수도사업소

4) 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임 1) 준공기한 연기 보고서 1부.

2) 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이원근		급수관리팀장	代류태현		급수운영과장	11/02 이용구
협조자
시행	급수운영과-18205	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	4576	/전송		/		/	대시민공개