문서번호	시설관리과-26738
결재일자	2020. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최성현	박종일	11/04 송병욱
협 조

설계변경(정산) 도서 제출에 따른 검토사항 보고

(제기동 635-17번지 외 8개소 배급수관 정비공사)

2020. 11.

동부수도사업소

시설관리과

설계변경(정산) 도서 제출에 따른 검토사항 보고

현재 시행중인 「*****************************」와 관련 서울시설공단의 설계변경(정산) 도서 제출에 따른 검토사항을 보고 드림

Ⅰ		공 사 현 황

◯ 공 사 명: ****************************

◯ 공사개요: *******************

◯ 공사기간: ***************************

◯ 도 급 액: ************

◯ 시 공 사: ****************

◯ 감독기관: 서울시설공단(공사감독2처)

Ⅱ		검 토 내 용

[공사감독2처-16556(2020.10.26.)호]

◯ 공사금액 변경

구 분	금액(원)		증·감(원)	비 고
	당 초	변 경
공급가액	558,684,909	606,090,909	증) 47,406,000	물량증감 및 신규공종 발생
부 가 세	55,868,491	60,609,091	증) 4,740,600
*****	***********	***********	*************

◯ 당초개요: D=20~300mm, L=1,446m 밸브실 설치(38개소)

◯ 변경개요: D=20~300mm, L=1,744m 밸브실 설치(43개소)

◯ 설계변경심의 검토의견 조치 결과서

◎ 공사명 : 제기동 635-17번지 외 8개소 배급수관 정비공사

검 토 의 견

조 치 결 과

1. 공법변경 검토

○ 해당사항 없음

2. 제경비의 적정성 검토

○ 공사비 증액에 따른 산업안전보건관리비 실정산 반영

○ 제비율 검증 시 상한초과

3. 수량산출의 적정성 검토

○ 횡단굴착시 터파기→인력, 깨기및되메우기→기계

○ 환토재 할증 9% 미반영

○ 철개고정장치 설치 수량 누락

○ 깨기 수량과 걷기및싣기 수량 상이

○ 익일 재굴착 D250이하 2m, D300이상 3m

○ 이음부토공 0-1m 물량 제외

○ 토사소운반 경비로 적용

○ 링크립삽입공=천공분기점분기

○ 철개고정장치 나사조임 수량 상이

4. 단가산출의 적정성 검토

○ 사인보드카 계약물량을 초과하는 물량은 2020년

기준으로 신규단가 산출 필요

5. 자재변경 및 재활용의 적정성 검토

○ 해당사항 없음

6. 기타사항

○ 내역서에서 부지임대료 금액 상이

1. 공법변경 검토

○ 해당사항 없음

2. 제경비의 적정성 검토

○ 공사비 증액에 따른 산업안전보건관리비 실정산완료

○ 제비율 검증 시 상한초과 금액 감액 반영

3. 수량산출의 적정성 검토

○ 터파기→인력, 깨기및되메우기→기계 반영 완료

○ 환토재 할증 9% 반영 완료

○ 철개고정장치 설치 수량 반영 완료

○ 깨기 수량과 걷기및싣기 수량 조정 완료

○ 익일 재굴착 D250이하 2m, D300이상 3m 반영

○ 이음부토공 0-1m 물량 제외 반영 완료

○ 토사소운반 경비로 반영 완료

○ 링크립삽입공=천공분기점분기 조정 완료

○ 철개고정장치 나사조임 수량 반영 완료

4. 단간산출의 적정성 검토

○ 사인보드카 계약물량 이하로 당초 계약단가 적용

5. 자재변경 및 재활용의 적정성 검토

○ 해당사항 없음

6. 기타사항

○ 내역서에서 부지임대료 금액 정상 표기

공사비 증.감내용(금액단위:천원)

- 심사 전 / 후 도급액 (증·감액) : 673,600천원 / 666,700천원 (감) 6,900천원

구 분	계		공법변경		제경비 오류		수량산출 오류		단가산출 오류		자재변경 및 재활용		기 타
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
증 가 분	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금액변동無	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
감 소 분	11	6,900	-	-	2	1,300	9	5,600	-	-	-	-	-	-
계	12	6,900	-	-	2	1,300	9	5,600	1	0	-	-	-	-

Ⅲ		조 치 계 획

▢ 설계변경 심의위원회 개최

◯ 설계변경(정산) 도서 제출에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과를 토대로 설계변경 시행 및 계약의뢰 하고자 함.

붙임  1) 설계변경(정산) 검토 보고서 제출 1부.
2) 설계변경 검토의견 1부.
3) 설계변경 내역서 1부.
4) 검증확인서 1부.
5) 4대보험 확인서 1부.  끝.