투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	신월IC 가속차로구간 지장물 이설기간 단축 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 관리중인 「신월IC 가속차로」구간의 지장물(가로등 및 가로등맨홀) 이설이 지연될 경우 신월IC 가속차로 공사를 서울제물포터널의 개통인 2021.4월 전까지 완료하기 어려울 것으로 예상되어 지장물 이설 기간 단축을 요청합니다.

3. 「신월IC 가속차로」 공사가 개통 전까지 완료되지 않을 경우 서울제물포터널 개통과 관련하여 많은 문제가 발생하오니 적극 협조 바랍니다.

붙임 : 관련서류 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍민철		방재시설과장	김태중		방재시설부장	11/04 代김태중
협조자
시행	방재시설부-15354	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	mchong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)