문서번호	토목부-21205
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	11/03 김용제
협조

부력방지앵커 검토 용역비 반영 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사]

2020. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

부력방지앵커 검토 용역비 반영 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사]

설계시 추정한 지하수위(G.L(-1m)가 변동되어 저류조 부력방지앵커 적용을 위한 기술자문회의 개최 결과 지하수 침투해석을 통한 부력방지앵커의 적정 수량을 산정토록 의견제시되어 지하수 침투해석 용역을 실시하고자 검토 보고 드림.

※ 지하수 침투해석 용역 : 도급비 증10백만원

Ⅰ		관 련 근 거

○ 신림차고지(감) 제2020-205호('20. 10. 26.) : 기술자문회의 결과보고

○ 신림차고지(감) 제2020-210호('20. 10. 29.) : 부력방지앵커 검토 비용 실정보고

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2 일원

○ 규    모

- 주 차 장 : 버스 101대 (지상, 지하1층)

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하2층)

○ 공사기간 : 2018. 10. 01.~2021. 09. 29.(2차 ‘19.12.20.~’20.12.31.)

○ 도 급 비 : 33,579백만원(2차 6,000백만원)

○ 시 공 사 : 삼영종합건설㈜ 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 부력방지앵커 수량 및 규격 결정을 위한 지하수 침투해석이 필요한바, 아래와 같이 용역 시행이 필요함.

○ 지하수 침투해석 용역비 검토

(금액단위 : 백만원)

구 분	㈜화성에스엔씨	㈜제일엔지니어링 종합건축사사무소	셀파이엔씨(주)	비 고
용 역 비	16	15	10
적 용			◎

Ⅳ		조 치 의 견

○ 본 공사의 부력방지앵커 설치는 302공이나, 지하수위가 낮아져 지하수 침투해석을 통한 수량 및 길이가 감소할 것으로 예상되는바, 정확한 해석을 실시하여 공사비를 절감하고자 합니다.

붙임  1. 기술자문회의 결과보고서 1부.

2. 감리단 검토의견서 및 내역서 1부.  끝.