문서번호	기전과-6232
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	11/05 장상규
협조
	주무관		문준호

『옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사』

설계변경(1차) 검토 보고

2020. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

『옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사』

설계변경(1차) 검토 보고

『옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사』시행 중 공사시간 변경에 따른 신규공종 추가사항이 발생하여 검토 후 설계변경 추진코자 함

□ 관련근거

○『옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사』예산 추가 신청 및 사용 검토보고

(기전과-5528호, 2020.10.12.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사

○ 계약금액 : *************

○ 착 공 일 : 2020. 09. 08.

○ 준공기한 : 2020. 11. 16.

○ 공사내용 : 방전등기구 552등 철거 및 LED등기구 492등 설치

○ 계약업체 : ****************

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 사유 : 공사시간 변경(주간 → 야간)에 따른 공사비 증액

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 , 감	비 고
도급비	공급가액	**********	***********	**************
	부가가치세	*********	**********	***************
	합 계	***********	***********	**************

○ 주요 변경 내역

(단위 : 원)

연번	공 종	규 격	수 량	내 역		공 사 비 (증 , 감)
				변경전	변경후
1	교통정리	교통안내	15일	주간	야간	***************
2	터널등기구 철거	250W 이하	416개	주간	야간	**************
3	터널등기구 철거	200W 이하	136개	주간	야간	***************
4	터널등기구 설치	100W 이하	492개	주간	야간	**************

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후 조명설비 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함

□ 향후계획

○ ’20. 11. 04. : 변경계약 의뢰

○ ’20. 11. 16. : 준공 및 준공검사

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.