문서번호	기술심사담당관-18439
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	기술심사담당관
윤희태		안계훈	11/05 代류용열
협 조
	토목심사팀장			신상형
	건축심사팀장			백윤기

서남집단에너지시설 2단계 기본설계 설계경제성(VE) 검토 실행계획

2020. 11.

서남집단에너지시설 2단계 기본설계

설계경제성(VE) 검토 실행계획

「서남집단에너지시설 2단계 기본설계 용역」에 대해 설계VE 소위원회를 구성하고, 설계경제성(VE) 검토를 추진하고자 함

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 검토 운영계획(행정부시장 방침 제17호, 2020.1.29.)

□ 설계경제성 검토 요청(서울에너지공사 공사관리-581, 2020.11.4.)

2		검토 요청 개요

************************************

******************************************

****************************************************

******************************************

***********************************

******************

3		운영협의회 협의사항

□ 운영협의회 구성

○ 위원장 : 기술심사담당관

○ 간  사 : 설비심사팀장

○ 위  원 : 토목심사팀장, 건축심사팀장

□ 운영협의회 검토회의

○ 회의일시 : ’20.11.4.(수) 17시

○ 검토내용

-「서울특별시 설계경제성(VE) 검토 운영지침」에 의해 설계경제성(VE) 검토 대상사업(총공사비 50억원 이상)이므로 검토함이 타당함

□ 운영협의회 협의결과 : 기술심사담당관 대행

4		검토 계획

□ 주요 검토내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진방법 : 설계경제성검토 소위원회 구성 및 설계경제성 검토

○ 설계경제성검토 소위원회, 발주부서, 설계사 등 20명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
설비분야	▸위 원 장 권완택 기술심사담당관 ▸간 사 안계훈 설비심사팀장 ▸설계VE 담당 윤희태 주무관	․ 설계경제성(VE) 검토 계획 ․ 회의 지원 등
토목,건축분야	▸위 원 장 권완택 기술심사담당관 ▸간 사 백윤기 건축심사팀장 ▸설계VE 담당 이광백 주무관	․ 설계경제성(VE) 검토 계획 ․ 회의 지원 등

○ 설비 및 토목ㆍ건축 2개 분야로 나누어 설계경제성(VE) 검토 시행

▶ 설비 분야

구 분	구 성 원	역 할
리 더	***********************	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	***********************	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (4개 분야)	***************************** **************************** ******************************* ******************************* ****************************** *****************************	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	*************************	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자	***********************	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

▶ 토목ㆍ건축 분야

구 분	구 성 원	역 할
리 더	*******************	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	*******************	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (6개 분야)	****************************** ******************************* ************************ ****************************** ******************************* *************************	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	*************************	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자	***********************	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계경제성(VE) 검토 회의 세부일정

일 시	내 용
’20. 11. 11.(수) 10:00~17:00	- 사업설명 및 질의응답, 기능분석, 성능평가, 현장답사 ‣운영 : 설비, 건축, 토목분야 통합 시행 ‣장소 : 서소문2청사 20층 대회의실
’20. 11. 13.(금) 10:00~17:00	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ‣운영 : 설비분야와 건축·토목분야 개별 시행 ‣장소 : 기술심사담당관 7층 회의실
’20. 11. 23.(월) 10:00~17:00	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정 ‣운영 : 설비분야와 건축·토목분야 개별 시행 ‣장소 : 기술심사담당관 7층 회의실
’20. 11. 26.(목)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (기술심사담당관 ⇒ 서울에너지공사)
’20. 12. 03.(목)	- VE 제안 채택결과 회신 (서울에너지공사 ⇒ 기술심사담당관)
’20. 12. 10.(목)	- 설계경제성(VE) 검토 결과 통보 (기술심사담당관 ⇒ 서울에너지공사)

5		소요 예산(안)

*********************************

************************

*********************************************

****************************************************

**********************************************

******************

□ 지급부서

○ 위원 수당 : 요청부서(서울에너지공사)

○ 기타 운영비 : 기술심사담당관

5		소요 예산(안)

□ 설계경제성(VE) 검토 결과 통보(’20.12.10. 예정)

붙임 1. 설계경제성 검토(VE) 신청서 1부.  끝.