문서번호	전시기획과-6751
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전시기획과장	서울공예박물관장
임하연		채영	11/05 김정화
협조

공예작품설치 지명공모 실무용역 월간 보고[10월]

2020. 11.

서울공예박물관

(전시기획과)

공예작품설치 지명공모

실무용역 월간 보고[10월]

서울공예박물관 공예작품설치를 위한 실무용역을 수행하고 2020년 10월 추진 현황을 아래와 같이 보고함

□ 추진근거 및 경과

❍ 서울공예박물관 공예인테리어 조성계획(전시기획과-9,’18.11.26)

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 추진계획(전시기획과-3487,’19.8.30)

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역 시행(변경)(전시기획과-5856,’19.12.16)

❍ 공예작품설치 지명공모 실무용역 착수보고회 결과보고(전시기획과-6095,’19.12.23)

❍ 공예작품설치 지명공모 선정작가 워크숍 결과보고 (전시기획과-1390, ’20.2.26)

❍ 공예작품설치 지명공모 실무용역 월간보고(’19.12~’20.9)

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역

❍ 사업기간 : 2019.12.~2020.12.

❍ 소요예산 : 171,900천원

❍ 용 역 사 : ******

❍ 주요 과업 내용

-공예작품설치 지명공모 기획‧운영 총괄

-공모진행 및 작품제작 과정기록

-작품운송‧설치 지원

-작품 유지보수 및 관리안전 매뉴얼 작성

-공모 관련 자료전시회 기획 및 설치, 운영

-기타 사업추진 전반에 관한 사항

□ 추진현황

일 시	2020.10.1.(목)-10.3(토)
장 소	서울공예박물관 직물관 외벽
참 석 자	‧ 실무용역 ****************************** ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가 *********************
진행내용	- 직물관 외벽작품설치 및 완성(9.29~10.3) - 설치과정 영상 촬영

❍ ***** 작품설치 및 촬영

❍

일 시	2020.10. 5(월)11:00-12:00
장 소	아트리움 로비
참 석 자	‧ 실무용역 ***** ‧ 서울공예박물관 : 관장, 전시과장, 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가 *****************
진행내용	전시콘텐츠협의 전시도록 구성협의

***** 설치현장 컨디션 확인

❍ 프로젝트 참여작가 제안모형 촬영

일 시	2020. 10. 7(수) 9:30-12:00
장 소	삼성동 수장고
참 석 자	‧ 실무용역 ********************* ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관, 연구원
진행내용	공예작품설치 지명공모 참여 작가별 제안모형 촬영

❍

일 시	2020. 10. 7(수)17:00-18:00
장 소	서울공예박물관 관장실
참 석 자	‧ 실무용역 ************* ‧ 서울공예박물관 : 관장, 전시과장, 담당주무관2, 조경당당주무관
진행내용	프로젝트 진행 결과 중간보고 및 향후 추진계획 보고 전시공간 디자인 안 보고

프로젝트 중간보고

❍****** 설치현장 컨디션 확인

일 시	2020. 10.12(월) 10:00-11:00
장 소	동관 필로티 현장
참 석 자	‧ 실무용역 **** ‧ 서울공예박물관 : 전시과장, 담당주무관1, 건축담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가**************
진행내용	작품설치 공간 컨디션 확인 설치공간 현장 실측진행 설치기간중 공간사용 관련 사항 협의

❍ 아카이브전시도록 편집회의

일 시	2020. 10.16(금) 10:00-13:00
장 소	용역사 회의실
참 석 자	‧ 실무용역 ******************************
진행내용	도록 제작방향 및 수록 콘텐츠 공유 제작일정협의

❍ ***** 작품반입

일 시	2020.10.20(화) 07:00-09:00
장 소	서울공예박물관 교육관 앞
참 석 자	‧ 실무용역 ************** ‧ 서울공예박물관 : 전시과장, 담당주무관2, 조경담당주무관, 뉴딜연구원 ‧ 지명공모 선정작가 ***************
진행내용	불로문 및 돌의자 작품 박물관 설치공간 반입 설치공간 주변 하차 및 각 설치위치 근처로 해당작품 이동

❍ ******작품설치 및 촬영

일 시	2020.10.20(화) 08:00-19:00
장 소	서울공예박물관 본관 로비
참 석 자	‧ 실무용역 *********************** ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가 ************
진행내용	안내데스크 작품 반입 및 설치 영상 및 사진 촬영

❍ ******전시물 수합

일 시	2020.10.21(수) 11:00-12:30
장 소	작가 작업실(익선동)
참 석 자	‧ 실무용역 ************** ‧ 지명공모 선정작가 **************
진행내용	전시물 확정 및 실물 수합 작품 사진 촬영

❍ ***** 전시물 수합

일 시	2020.10.22(목) 9:00-11:30
장 소	작가작업실(가평)
참 석 자	‧ 실무용역 ************** ‧ 지명공모 선정작가 *******
진행내용	전시물 확정 및 실물 수합 작품 사진 촬영

❍ ***** 전시물 수합

일 시	2020.10.22(목) 14:00-16:00
장 소	작가작업실(청주)
참 석 자	‧ 실무용역 ************** ‧ 지명공모 선정작가 *******
진행내용	안내데스크 작품 반입 및 설치 영상 및 사진 촬영

❍ ******작품설치 및 촬영

일 시	2020.10.22(목) 07:00-17:30
장 소	서울공예박물관 동관 은행나무 부근
참 석 자	‧ 실무용역 ****************** ‧ 서울공예박물관 : 전시과장, 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가 ************
진행내용	불로문 설치 8도 돌의자 위치잡기 및 수평잡기

❍ 실무팀 진행회의

일 시	2020.10.24(토)11:30-16:00
장 소	용역사 회의실
참 석 자	‧ 실무용역 ************************************ ***
진행내용	전시도록 구성협의 원고 작성가이드 협의 추후 일정협의 뉴스레터 3호 일정협의 전시공간 연출 및 디자인 협의

❍ ***** 작품설치 및 촬영

일 시	2020. 10.25(일)~10.30 (금)
장 소	서울공예박물관 아트리움 로비
참 석 자	‧ 실무용역 *********************************** ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가 ************
진행내용	작품설치용 비계설치 (10.25) 천정 고정용 오링교체작업 (10.26) 구조 프레임 설치 (10.28) 전기공사(10.29) 영상 및 사진촬영 (10.29) 유리 모듈설치 (10.29~30)

❍ ***** 작품설치 및 촬영

일 시	2020.10.26(월) 14:30-18:00
장 소	서울공예박물관 아트리움 로비
참 석 자	‧ 실무용역 *********************** ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가 ************
진행내용	안내데스크 작품 반입 및 설치 영상 및 사진 촬영

❍ 설치작품 보양작업

일 시	2020.10.26(월) 10:00-20:00
장 소	서울공예박물관 본관, 아트리움
참 석 자	‧ 실무용역 *************** ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가 ************
진행내용	******************작품 보양작업

□ 추진실적

추진실적	추진기간	단계	비중	달성율
용역공정관리 ‧ 착수보고회 ‧ 중간보고회 ‧ 최종보고회	‘19.12.~’20.12	실행	6%	70%
공예작품설치 기본계획 전략수립‧환경 분석 ‧ 기본계획수립, 설치공간 분석‧인테리어 협의	’19.12.~’20.3	실행	14%	87%
과업이행 : 기록 ‧ 자문회의, 작가워크숍, 보고회 진행 기록 ‧ 공예작가 작품 제작과정, 완료 기록 ‧ 공예작가 인터뷰 영상기획, 촬영 및 편집	’20.1.~’20.10.	실행	35%	80%
과업이행 : 전시 ‧ 작가작품 전시회 기획‧콘텐츠 구성 ‧ 전시공간 설계 및 제작설치, 작품 운송 ‧ 전시그래픽, 영상콘텐츠 기획 및 설치 ‧ 인쇄물(전시리플렛,안내서,포스터) 제작	’20.5.~’20.10.	준비	25%	30%
과업이행 : 홍보 ‧ 서울공예박물관 홍보계획 수립 및 실행 ‧ 보도자료 작성, 기자간담회 계최 ‧ 온라인 SNS, 오프라인 매체 홍보	’20.5.~’20.11.	준비	15%	45%
준공, 과업완료 ‧ 결과보고서 등 성과품 납품(‘20.12.10)	’20.12.	준비	5%	0%
합 계			100%

※추진기간 및 단계는 일정에 따라 변경 가능

❍ 작품 제작과정 촬영 및 기록 ❍ 중간보고회 ❍ 작품 설치 및 시운전	’20. 5월~9월 ’20. 7월 ’20. 10~11월

□ 향후계획

붙임 1. 업무현황보고서(10월) 1부.

2. 회의사진 1부.  끝.