문서번호	시설과-8258
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		김형준	11/05 강호광
협 조
	주무관			박건수
	주무관			임춘길
	주무관			최성태
	주무관			강정구

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 사후평가용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최결과 보고

2020. 11.

시설관리부

[시 설 과]

「구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 사후평가 용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최결과 보고

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 사후평가 용역』에 대한 계약 금액조정 심사 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 사후평가용역

❍ 사업규모

- 표준정수처리 25만톤/일, 고도정수처리 1,813만톤/일

- 총사업비 : 1,813억원

❍ 과업내용

- 현황조사 및 분석, 사업 전․후  사업비, 사업기간 등 비교분석

- 수요, 기대효과 등 사업효과 비교분석

- 당해 건설공사의 문제점 및 개선방안

❍ 계약기간 : 2020. 3. 9. ~ 11. 8.

❍ 계약금액 : 77,785천원

❍ 계 약 자 : (주)대한콘설탄트 대표 이영순

소위원회 개최 개요

❍ 일   시 : 2020. 11. 5.(목) 10:30 ~ 11:00

❍ 장   소 : 시설관리부 회의실

❍ 위   원 : 시설과장, 시설6급 최성태, 강정구, 임춘길, 시설7급 박건수

계약금액 조정 심사내용

❍ 설계변경 사유

1) 직접인건비 감소에 따른 정산

- 코로나19로 주민만족도 미실시에 따른 물량정산

구 분		당초	변경	증/감
직접인건비	특급기술자	9.9	8.5	감) 1.4
	고급기술자	19.7	16.9	감) 2.8
	중급기술자	41.3	35.8	감) 5.5
	초급기술자	85.0	71.9	감)13.1

❍ 용역비 변경내용

(단위:원)

구분		당초	변경	증/감
합계		77,785,700	66,938,000	(감)10,847,700
도급비	계	77,785,700	66,938,000	(감)10,847,700
	공급가액	70,714,273	60,852,728	(감) 9,861,545
	부가세	7,071,427	6,085,272	(감) 986,155

심사결과 : 적정

- 직접인건비 정산에 의한 설계변경 사항을 심의한 결과 적정하여 원안가결 하여 설계변경 반영함이 타당

2020년 11월 5일

위 검토자 : 계약금액조정 심사 소위원회

팀 장 :	시설과장			김 형 준
팀 원 :	누수방지과		지방시설주사	최 성 태
	공간정보과		지방시설주사	강 정 구
	시설과	시설관리팀	지방시설주사	임 춘 길
		시설팀	지방시설주사보	박 건 수

붙 임 : 변경내역서 및 수량산출내역 각 1부.  끝.