문서번호	시설보수과-8859
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김권수		오재섭	11/05 고영준
협조
	★주무관		오광준

「당현천5복개구조물」

정밀점검용역 시행 계획

2020. 11.

북부도로사업소

(시설보수과)

「당현천5복개구조물」

정밀점검용역 시행 계획

시도상(상계로)에 위치하고 있는 당현천5복개구조물에 대한 정밀점검용역을 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 미지정 시설물 추가 및 시설물 종별 변경 계획 :

(북부도로사업소 시설보수과-406, 2020.01.15.)

□ 시설물 현황

시설명	위 치	준공년도	종별(예정)	구조형식	규 모	점검내역	비고
당현천5복개	당고개역~ 상계동67-6	1993 (추정)	2종	3,4련 BOX	B=12~16m L=203m	노원구 하수암거 정밀점검용역(2019)

위치도 및 현황사진

당현천5복개구조물

복개구조물 종점

복개구조물 시점

□ 추진현황

○ 2019. 8. 22. : 당현천 복개시설물 관리기관 확인 및 의견 요청(시설보수과-6760)

○ 2019. 9.  2. : 당현천 복개시설물 관련 의견 회신

(노원구 치수과- 10214, 2019.9.2.)

- 해당구간에 대한 보수 등 정비예정

○ 2020. 1. 16. : 관리기관 미지정 시설물 관리계획 보고

(북부도로사업소 시설보수과 → 서울시 도로시설과)

○ 2020. 7. 13. ~ 2021. 1. 8. : 노후 하수박스 보수공사 시행 (노원구청 치수과)

□ 정밀점검용역 시행 계획

○ 1999년 “당현천 복개구조물” 인계·인수 당시 당현천5복개구조물이 누락되어 시설물의 관리주체 부재

○ 2021년 노원구로부터 인수전 시설물 상태 확인을 위해, 금년 계약되어 시행중인 「화계천복개구조물 등 5개시설 정밀점검용역」에 포함하여 추가 과업지시를 시행하고자 함.

○ 예산확보 방안

- 도로시설과 시설물 안전점검 예산 낙찰차액 활용

- 소요예산 : 증)26,335천원 (낙찰율 적용)

(단위 : 천원)

용 역 명	발주금액	계약금액	낙찰차액	비 고
화계천복개구조물 등 5개시설 정밀점검용역	196,737	169,735	27,002

※ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 과업추가에 따른 기간연장

추 가 과 업	과 업 기 간		비 고
	변 경 전	변 경 후
당현천5복개구조물	2020.05.06. ~ 2020.12.01.	2020.05.06. ~ 2021.02.28.

□ 행정사항

○ 「화계천복개구조물 등 5개시설 정밀점검용역」 용역사에 당현천5복개구조물 정밀점검 시행토록 추가 과업지시하고 준공기한 연장 및 설계변경 시행

○ 사고이월 조서 제출 (북부도로사업소 시설보수과 → 서울시 도로시설과)

○ 정밀점검용역 완료 후 시설물정보관리종합시스템에 등재

○ 정밀점검용역 결과에 따라 내년 정밀안전진단 시행여부 결정

붙 임 : 1. 용역비 산출내역서 1부.

2. 현황사진 1부.  끝.