문서번호	시설과-8323
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	관리부장
한상길	손병대		11/09 오성문
협 조

‘생명에 대한 감동과 보전의 중심 ’서울대공원 2030 비전 실행

「서울랜드 동문주차장 개선공사」 현안사항 검토보고

2020. 11.

서울대공원

시설과

「서울랜드 동문주차장 개선공사」

현안사항 검토보고

「서울랜드 동문주차장 개선공사」감독업무 수행 중 ㈜서울랜드로 부터 주차장내 배수처리 및 입구 안전사고 예방을 위한 추가 정비 요청이 있어 이를 검토 보고함.

1		공사개요

○ 위     치 : 서울랜드 동문 주차장 일원

○ 공사규모 : 면적 약 15,000㎡     (현황 : 승용차 기준 753대 주차)

- 주차방향 경사로 2% → 0% 조정

- 주차면 조정 : 753대 → 656대 (97대 감소)

· 일반주차 576대, 장애인 주차 20대(주차면의 3%), 경차 주차 60대

○ 공사기간 : ’20. 10. 23.~ ’21. 1. 20.

○ 공 사 비 : **********

- *********************************************

- ****************

○ 시 공 사 : ****************

*****************

2		현안사항

1. 동문주차장 내 배수로 신설 요청

○ 동문 주차장은 횡단경사는 0% 종단경사는 4~7%로 개선됨에 있어 강우시에는 노면수가 주차장 입구로 집중 유입 될 것으로 판단되며, 특히 입구 양측은 횡단경사가 없이 끝단부가 보도로 막혀있어 강우시에는 물고임 현상이 발생 될 것으로 예견되므로 별도의 배수계획이 필요한 실정임.

☞ 변경개요 : 당초) 미반영   ⇒    변경) U형수로(300×300)설치  L= 72m (36m × 2)

☞ 개략공사비 내역                                                      (단위 : 원)

공 종	개략 공사비 (제경비포함)			비고
	구 분	당초	변경
철근콘크리트용 배수로관	**		*********
	***	*	*********
	***	*	*********

2. 주차장 입구 노후 파손된 보행로 정비 요청

○ 동문 주차장 입구의 종단경사는 7%로 포장(ASP) 및 경계블럭의 노후 파손이 심하여 보행자, 특히 어린이 노약자 등 보행약자의 안전사고 위험이 있어 정비가 필요한 실정임.

☞ 변경개요 : 당초) 미반영

변경) 노후 보도, 경계석 정비  L= 80m (40m × 2) , B=2m ∴ A=1.6a

☞ 개략공사비 내역                                                      (단위 : 원)

공 종	개략 공사비 (제경비포함)			비고
	구 분	당초	변경
주차장 입구 안전 보행로 정비	**		**********
	***	*	**********
	***	*	*********
	*****		*********
	******		*********

○ 계획 평면 및 추가정비 요청구간

보행로 정비 요청

배수로 설치 요청

보행로 정비 요청

3		검토 및 조치의견

❏ 검토내용

- 위 내용과 같이 현장 여건의 변경(물고임 예방)과 관람객 특히 보행약자의 안전을 위해 보행로 정비는 필요한 사항으로 판단됨.

❏ 조치의견

- ***********************************************

- *************************************

❏ 예산현황                                                               (단위:천원)

******		*****	*****	****	*****	***
*****		*******	*******	******	******	******
*************	***	*******	*******	******	******	******
	***	*******	*******	*	*	*

붙임 :서울랜드 요청공문 1부.  끝.