투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰 (화계천복개 등 5개시설 정밀안전점검용역)

우리 사업소에서 시행중인 『화계천복개 등 5개시설 정밀안전점검용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 화계천복개 등 5개시설 정밀안전점검용역

나. 용역기간 : 2020. 5. 6. ~ 2020. 12. 1.

다. 용 역 비 : 금169,735,000원

라. 용역개요 : 화계천복개, 정릉천1,3,4복개, 우이천3복개 정밀안전점검

마. 계 약 자 : ㈜한국국토안전연구원, ㈜정신이앤시

바. 변경사유 : 당현천5복개구조물에 대한 추가과업 수행

사. 변경내용

- 금액변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
용 역 비	169,735,000	196,070,000	증)26,335,000

- 준공기한 연기

․ 당초 : 2020. 5. 6. ~ 2020. 12. 1.

․ 변경 : 2020. 5. 6. ~ 2021.  2.28.

․ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

․ 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 관련서류 일체 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	김권수		시설보수과장	11/09 오재섭
협조자
시행	시설보수과-8951	(		)	접수		(		)
우	01137	서울 강북구 한천로 913	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5454	/전송	02-945-5073	/	kimgs72@seoul.go.kr	/	대시민공개