문서번호	관리단속과-14157
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리단속과장
이영일		박만춘	11/09 이성택
협조

『청사 노후시설 환경개선공사』

설계변경 검토(시행) 보고

2020. 11.

동부도로사업소

(관리단속과)

『청사 노후시설 환경개선공사』

설계변경 검토(시행) 보고

「청사 노후시설 환경개선공사」전기온수기 용량증대 신규 설치, 배관설치,전기설비 이설 등 추가공사 필요에 따라 다음과 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 청사 노후시설 환경개선공사

○ 공사규모 : 당직실 화장실 외 5개소 개선

○ 공사기간 : ’20. 11. 2. ~ 11. 21.

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : **************

Ⅱ		설계변경 검토(시행)

○ 공사비

(단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	증·감	비 고
공급가액	*********	*********	*******
부가가치세	*******	*******	******
계(공사비)	*********	*********	*******	원단위 절사

○ 세부 증․감 내용

구 분		설 계 변 경 사 유	증 ․ 감액(원)
총 계			*******
1	당직실 전기온수기 용량 증대 설치	- 샤워용으로는 온수용량이 일부 부족함에 따라 온수기 온수 용량을 증대하여 구매 설치(50ℓ 설치)	*******
2	전기온수기 배관 설치	기존 당직실에서 사용하던 전기온수기(30ℓ)를 구내식당으로 이전하여 설치(배관 신설)	*******
3	전기온수기 전기설비 이설	구내식당 온수기 설치에 따른 전기설비 이설	*******
4	유압 도어 슬라이드 교체	- 당직실 유압 도어 슬라이드 고장에 따라 슬라이드 교체	*******

Ⅲ		보고자 검토의견

○ 위 설계변경 사항은 우리사업소 추가공사 필요에 따라 추가되는 공종 및 물품이므로「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장 공사계약 일반조건에 의거 협의단가(설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50)를 적용․시행코자 함.

붙임  1. 계약서 및 내역서 각 1부.

2. 견적서(추가 작업분) 1부.

3. 추가 물량 협의단가 가격조서 1부.

4. 변경계약 내역서(안) 1부.  끝.