문서번호	기전과-9239
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		11/09 서승완
협조

『여의도 파크원 복합시설』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

강서도로사업소

(기전과)

『여의도 파크원 복합시설』

실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호, 표지) 원인자부담공사와   관련 실정보고가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-4109(2019.02.27.)호 및 -8785(2019.04.12.)호

Y22-2020-10-29-01(2020.10.29.)호

대영전기감GE 20C-11-12(2020.11.05.)호

대영전기감GE 20C-11-16(2020.11.16.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 여의도 파크원 복합개발사업 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : 와이입십이프로젝트금융투자(주)

공사기간 : 2019.08.05. ~ 2020. 11. 15.

공사장소 : 영등포구 여의대로 108 일대

공사개요 : 교통안전시설(신호/표지) 개선 설치

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	대영유비텍㈜	대영유비텍㈜	우진신호㈜	· 제어기 교체 1대 · 지주 신설23, 이설7, 철거16본 · 신호등 신설38, 이설12, 철거16조 · 음향신호기 신설16, 이설3, 철거2대
표지	대영유비텍㈜	대영유비텍㈜	㈜다물그린	· 표지 신설 40, 교체 4매

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용 : 경찰청 규제변경 및 현장 여건 변동에 따른 물량 변경 등

실정보고 상세내용

▷ 신호기

교차로명	변경내용		사유
	변경전	변경후
여의도광장	P6, P7 철거, P4, P5 신설	P6, P7 존치	보도폭 축소 및 신호시인성 저하
	도로횡단 배관 재사용	도로횡단 배관 신설	기존 관로 노후
LG빌딩교차로	P3 존치	P3 철거 및 신설(띠녹지)	사유지
공작아파트	P7, P9 신설	P1 신설	지장물(사유지 방수층)
공작아파트연등	연등	연등 분리	지중선로 사유지 경유
삼부아파트	-	보행지주 위치 변경	지장물(환기구)
MBC앞	P6(전방) 신호등 추가	P3(후방) 신호등 추가	P6 지장물(공동구)
	P6(차/보)	P6(차), P5(보행) 분리	횡단보도 이설

▷ 안전표지

교차로명	변경내용		사유
	변경전	변경후
여의도광장	최고속제제한, 보조표지 신설	-	5030사업으로 선 시행
공작아파트	좌회전금지 P7, P9에 신설	좌회전금지 P1에 2매 신설	신호 지주 위치 변경
MBC앞	U턴, 보조 전방신호에 설치	U턴, 보조 후방신호에 설치	신호 부착대 변경
	정주식 13매 신설	부착식 13매 신설	가로등 설치

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임 1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 설계변경 도면 각 1부.  끝.