문서번호	급수운영과-17475
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
전동근		11/10 최춘근
협조

사토장 및 중간집하장 변경 검토보고

(2020년 강남구관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사)

2020.  11.

강남수도사업소

(급수운영과)

사토장 및 중간집하장 변경 검토 보고

(2020년 강남구관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사)

“2020년 강남구관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사” 관련하여 건설사업관리용역사 ㈜건양엔지니어링으로부터 사토장 및 중간집하장 위치 변경 현장실정보고서가 접수되어 검토하고 보고 드림.

관련근거: 현장실정보고(건양 2020-89)호

공사개요

*************************************************

****************************************

**************************************

******************************

*********************************

보고내용

1. 사토장 및 중간집하장 변경 사유

- 당초 설계서 상 발생 토사(사토)는 수도권매립지로 반입토록 설계되어있으나, 수도권매립지공사로부터 반입 토사 부적합 등의 사유로 반입 불가 회신돠어 사토장 변경 필요

※ 관련근거 : 수도권매립지관리공사 매립부-2321(2020.09.18.)호

- 현재 중간집하장(*********)은 토지가 협소하여 덤프트럭의 차량 회전 등으로 인해 작업자의 안전이 우려되며, 타 공사건의 시공사(포장공사 등) 자재적치장 등으로도 사용되어 중간집하장 변경 필요

- 상기와 같은 실정으로 사토장 및 중간집하장에 대하여 변경 조치하고 함

2. 사토장 및 중간집하장 위치 변경

가. 사토장 위치 변경

· 당초 : 중간집하장 ~ 수도권매립지 (L=57.2Km)

· 변경 : 중간집하장 ~ *******************************

나. 중간집하장 위치 변경

· 당초 : 현장 ⇒ 중간집하장(****************

· 변경 : 현장 ⇒  중간집하장(***************************)

***	******	******	******
**********************	**************	**************	*	*******
*************************	*******	********	*	******
***********************	*******	*****	*	*******
***************************	*******	******	*	*******
**************************	*******	******	*	*******

조치의견

□ 상기 사토장 및 중간집하장 변경건에 대해*********에 승인통보하고자 하며, 향후 설계 변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 함.

붙 임 : 1. 관련 공문 1부.

2. 현장실정 보고서 1부.  끝.