투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 회신(성내유수지교 정비공사 관련)

1. 공사감독1처-7534(2020.11.09.)호와 관련입니다

2.『성내유수지교 정비공사』관련 귀 공단에서 제출한 공사 실정보고(보수물량 변경 외 1건)에 대하여 검토후 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

□ 검토결과

○ 추가되는 공종(경계석 제거, 아스콘 포장 등) 및 물량 변경되는 공종(콘크리트 보수)에 대하여 귀 공단에서 제시한 의견대로 승인 통보하오며,

○ 아스팔드 포장 시공에 따른 자재(아스콘)는 기계약된『2020년 교량시설물 일상유지보수공사 외 1건』의 내유동성아스팔트콘크리트를 사용하고,

○ 건설폐기물은 기계약된『2020년 교량시설물 일상유지보수공사 외 1건 건설폐기물처리용역』업체에 위탁하여 처리하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김부호		시설보수과장	11/10 임영철
협조자
시행	시설보수과-9034	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0371	/전송	02-2040-0308	/	jam747@seoul.go.kr	/	대시민공개