문서번호	도로보수과-11367
결재일자	2020. 11. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		代이상하	11/11 김영철
협 조
	주무관			이상하

『2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

작업지시 검토 보고(제11차)

2020. 11.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

작업지시 검토 보고(제11차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2020.04.10. ~ 2020.12.31.

○ 시 공 사 : *****************

○ 총공사비 : ***********

- *******************************************

○ 주요공정 및 물량

- 소파포장보수 221a/절삭 후 아스팔트 덧씌우기 119a/공동작업 7.5hr

- 긴급소파보수(야간) 1,960hr/긴급소파보수(주간) 627hr

□ 보고내용

○ 우리사업소 관내 현장조사 및 민원 접수한 도로 침하, 포트홀, 균열 등의 발생 건에 대해 도로 정비 필요

- 민원 접수 8건/현장조사 18건

※ 현장조사자 : 도로보수과 순찰담당 및 각 구별 담당자

□ 조치계획

○ 도로 정비구간에 대하여 2020년 포장도로 긴급복구공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 안전사고를 사전에 예방코자 함.

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비 (계약금액)	기 집행액	금회 집행액	집행잔액
포장도로 긴급복구공사 (연간단가)	*********	*********	*******	******

○ 제11차 작업지시

- 건    명 : 2020년 포장도로 긴급복구공사 작업지시(제11차)

- 작업위치 : 장충단로 등 26개소

- 작업기간 : 2020.11.12. ~ 2020.12.04.

- 건설사업 관리자 : ***************

- 아스콘 납품업체 : 경서 및 인경 아스콘 협동조합[㈜태창 외 3개 업체 배정]

‣ 계약을 체결한 아스콘 납품업체 4개소와 납품 협의를 진행하여 정비 시행

- 필요금액 : **************************

‣ **************************

- 공종 및 물량 : 소파보수 15.00a(t=5cm~20cm)

‣ 정비 물량은 개략 작업으로 작업 완료 내역에 따라 정산처리

※ 포장복구 시 망실된 노면표시에 대하여 『2020년 노후포장 노면표시공사』에서 재도색 실시

□ 향후계획

○ 2020.11.12. : 작업지시 및 공사 시행

○ 2020.12.04. : 작업완료 및 결과 보고

붙 임 1. 제11차 작업지시 내역서 및 현장사진 1부.  끝.