투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(하늘공원 공원등 전기공사)

1. 시설과-2299(2020. 11. 2.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려 드리니, 계약기간 내     공사가 무위 준공될 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건명: 하늘공원 공원등 개선 전기공사

나. 계약자: 주식회사신안전력 대표 신안선

다. 계약금액: 금35,700,000원(금삼천오백칠십만원)

※ 원인행위No: 379, 1081

라. 계약기간: 2020. 10. 8.~ 2020. 11. 8.

마. 변경내용: 계약금액 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	32,454,546	38,300,000	5,845,454
	부가세	3,245,454	3,830,000	584,546
	도급공사비	35,700,000	42,130,000	6,430,000

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	공원운영과장
★주무관	김호영		재무팀장	김극남		공원운영과장	11/06 최석환
협조자
시행	공원운영과-14590	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)