문서번호	교육정책과-16438
결재일자	2020. 11. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
교육시설지원팀장	교육정책과장
최연호	11/06 오희선

(2020년 5차)

서울캠핑장(가족자연체험시설) 시설정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

교육정책과

(2020년 5차)

서울캠핑장 시설정비 계획

서울캠핑장의 열악한 시설을 1~4차 개선후 점검결과, 추가 보완개선이 필요하여 5차 시설 정비로 캠핑장 관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 서울캠핑장 운영혁신 계획(’19.11.28. 교육정책과-18499)

○ 서울캠핑장 시설개선 계획(’20. 1.17. 교육정책과-1033)

○ 2020년 서울캠핑장 운영계획(’20. 2. 7. 교육정책과-2115)

○ 시설개선을 위한 지역우수업체 추천 요청(’20. 2.11. 교육정책과-2398)

○ 서울캠핑장 신규조성 관련 검토보고(’20. 9.16 교육정책과-14279)

※ ’20년 시설정비 현황 : 1차(’20.3.12.), 2차(’20.3.30.), 3차(’20.5.13.), 4차(’20.9.4.)

□ 개선방법

○ 지역경제 활성화와 사후 유지관리 효율성을 위해 캠핑장 소재 지역업체를 통한 정비

※ 캠핑장 소재 지역경제 활성화를 위해 캠핑장 관리에 소명감을 가진 지역 업체 활용

- 현장 점검결과 지역 주민 및 업체에서 자발적으로 유지관리해주는 사례 다수 확인(동네 창고·특산물 무상 제공, 화단 정비, 울타리 무상 설치, 장비 무상제공 등)

○ 지역 우수 업체가 없는 경우, 캠핑장 정비 관련 경험이 있는 우수업체를 통한 정비

○ 소규모 정비의 경우 행정절차 간소화 및 지역상생을 위해 사무관리비로 현지에서 재료를 구입하여 정비

□ 그간의 추진실적

○ 1~4차 총 88건(682,647천원) 정비

(단위 : 건 / 천원)

구분	건수	금 액	수의계약 현황
계	88	682,647	15건(457,163)
1차	40	216,291	6건(152,677)
2차	18	120,315	2건 (35,455)
3차	24	129,459	1건 (52,449)
4차	6	216,582	6건(216,582)

· 1~4차 시설정비 계획에 의하지 않고 물품구매 등에 의한 소규모 직접 정비의 경우 제외

▶ 캠핑장별 정비 현황

계	횡 성	포 천	제 천	철 원	함 평	서 천	봉 화	상 주
88건	12	20	11	9	10	5	7	14
682,647	171,319	227,923	65,523	54,340	45,563	26,663	33,597	57,719

※ 당초 4차 정비계획에 포함된 횡성캠핑장 텐트 그늘막 설치는 5차에 시행

○ 1~4차 정비 결과 문제점 및 개선방안

- 지역상생과 사후 유지관리 편의성을 위하여 현지 업체를 통해 정비하고자 하나, 캠핑장 소재지가 지방 산간에 위치하여 업체 발굴의 어려움 상존

· 포천 캠핑장의 경우 3차 시설 개선계획에 따라 교사동 지붕 누수 보강, 부수시설 철거 등을 추진하려 하였으나, 4차에 서울 전문 업체를 통해 개선

· 포천캠핑장 조경시설은 타 지역 업체에 의해 개선, 횡성캠핑장은 원주시 업체에 의한 개선 등

- 재무회계 규칙상 ‘시설비는 계약에 의한 발주만 가능하다’는 소관부서(재무과) 의견으로, 지역 영세 업체의 계약절차 이행 불가로 지역상생 한계

※ 계약방법: 업체의 조달청 등록, 건설업면허 취득, 설계서 작성, 계약 이행...

☞ 지역상생을 위한 현지 업체를 통해 개선하되, 지역 업체가 없는 경우 타 지역의 캠핑장 정비 우수업체에 의한 정비(소규모는 사무관리비 집행)

□ 5차 정비 개요

○ 총 계 : 14건 329,340천원

(단위 : 건 / 천원)

계	횡 성	포 천	제 천	철원	함평	서천	봉화	상주
14	2	3	2	1	2	1	1	2
329,340	70,340	69,000	43,300	22,000	39,200	24,000	22,000	39,500

- 횡성 : 텐트 그늘막 전체 설치, 조경시설 정비

- 포천 : 텐트 그늘막 추가 설치, 교사동 뒤편 배수로 정비, 샤워실 설치

- 제천 : 텐트 그늘막 추가 설치, 교사동 방수 및 도색

- 철원 : 텐트 그늘막 시범 설치

- 함평 : 정문측 배수로 및 펜스 설치, 교사동 화단 계단 정비

- 서천 : 쌀문화 체험관(舊.장선초교) 부지내 추가 확보 공간 그늘막 설치

- 봉화 : 텐트 그늘막 추가 설치

- 상주 : 소음방지 담장 설치, 교실 천정 공사

※ 텐트 그늘막은 4차 정비 때 시범설치 결과 양호하여 나머지 물량 추가 설치

○ 정비방법 : 해당 내역별 수의계약에 의한 정비

※ 포천캠핑장 샤워실 컨테이너하우스는 조달 구매(자산 취득비)

□ 예산집행

○ 예산과목 : 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설

조성 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

※ 포천캠핑장 샤워실 컨테이너하우스는 자산취득비(44백만원 예상) 집행

☞ 본 방침서에 제시된 공사별 금액은 가견적 추정가로 실제 설계 가격에 따라 총액 범위내 사업간 조정될 수 있음

▸ 시설비 현황(신규조성비 564백만원 포함)

(단위 : 천원)

예산현액	집행액	집행잔액	금회 집행 예정액	집행후 잔액
884,000	555,264	329,371	329,340	31

□ 추진일정

○ 수의계약 발주 : ’20.11.13.까지

- 정비기간 : 착공일로부터 25일로 조기 완료하여 동절기 정비 지양

○ 정비현황 점검 : ’20.12. 8.까지

- 정비 기간중 1~2회 공사 감독, 정비후 준공 점검

붙임 : 정비 공사별 세부 내역 1부. 끝.