문서번호	재생정책과-15052
결재일자	2020. 11. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장관리팀장	재생정책과장
방기환		황향선	11/06 백운석
협조

광화문광장 저류조 및 저수조 청소 용역 설계변경 보고

2020.  11.

도시재생실

(재생정책과)

광화문광장 저류조 및 저수조 청소 용역 설계변경 보고

광화문광장 저류조 및 저수조 청소 용역에 대하여 광장분수 가동중지로 인한 물량 감소분을 반영하여 설계변경하고자 함

□ 용역개요

○ 건    명 : 광화문광장 저류조 및 저수조 청소용역

○ 계 약 자 : 가성그린 주식회사(대표 정태평)

○ 계약금액 : 금34,735,820원정(금삼천사백칠십삼만오천팔백이십원)

○ 계약기간 : 2020. 03. 30. ~ 2020. 11. 30.

□ 설계변경 내용

○ 광장분수 가동중지에 따른 청소 횟수 감소분

○ 설계변경 내역

공 종 (저류조․저수조 청소)	수 량		증․감	비 고
	당초	변경
-저류조 : 분수12-23(주, 보조, 수로) 역사물길, 중학백운천계류(광장) - 저수조 : 생활용수(B2 기계실)	70회	26회	감44회	광장분수 가동중지에 따른 감소분

○ 설계변경 금액

공 종	당 초(원)	변 경(원)	증․감(원)	비 고
총 용역비	34,735,820	10,736,000	감23,999,820	작업횟수 감소

□ 향후 추진계획

○ 물량 감소에 따른 설계변경 사항에 대하여 변경 계약 후 준공처리코자 함.

붙임  설계변경내역서 및 합의각서 각 1부.  끝.