문서번호	건축부-18783
결재일자	2020. 11. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		의료시설과장	건축부장
김재호		차무흥	11/06 代유현수
협조

건설폐기물 처리용역 (1차)준공 검토보고

(시립마포 실버케어센터 공사)

2020.	11.

도시기반시설본부

(건축부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

건설폐기물 처리용역 (1차)준공 검토보고

********************************************************************************]

1		용역개요

용 역 명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 건설폐기물처리용역(장기1차)

처리물량 : 건설폐기물 4,266,422톤

(폐콘크리트 2,493.724톤, 건설폐재류 1,434.188톤, 혼합폐기물 338.51톤)

용 역 사 : ㈜에스제이티, 중동환경㈜

용역기간 : 2019.5.8. ～ 2020.5.7.(총차: 2019.5.8. ～ 2022.2.7.)

용역금액 : 금185,500,700원(총차:231,876,000원)

2		추진경위

2019.04.30. : 용역 계약체결

2019.05.08. : 용역착수

2019.12.13. : 기성금지급 (금173,746,000원)

2020.10.30. : (1차)준공계 접수(폐기물업체 → 건설사업관리단)

2020.11.02. : (1차)준공계 검토보고(건설사업관리단 → 건축부)

3		준공검사

관련근거

○ 건설폐기물 처리용역(장기1차) 준공계 검토보고 [ 유탑(마실)20-148호, 2020.11.02.)]

*******

********************************************************************************

건설사업관리단 검토의견

○ 건설폐기물처리용역 준공계 제출 관련 완수된 기성금액으로 준공함이 타당함.

○ 준공계 제출 지연에 따른 지체상금(금2,735,319원) 부과함이 타당함

【 금2,735,319원 = 금11,754,700원 × 0.13%(지체상금율) × 179일(지연일수) 】

4		처리의견

건설사업관리단 준공검사 결과에 따라 준공 처리

지체상금은 고지서발급 의뢰(총무부) 후 현금납부

붙임 : 준공검사원 검토보고(건설사업관리단) 1부.  끝.