문서번호	기반시설과-4307
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
양정훈		라철흠	11/09 전영주
협조

『2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사』

적환장 도로설치에 따른 실정보고

2020. 11

한강사업본부

(기반시설과)

『2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사』

적환장도로 설치에 따른 실정보고

한강공원에서 발생하는 폐기물 수송차량이 월드컵대교 강교조립장 내로 차량통행 중이나 하천점용기간 만료 시 폐기물 수송도로 상실될 실정으로 진출입로 포장이 시급하다고 판단하여 보고드림

□ 공사개요

❍ 위    치 : 2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

❍ 사업기간 : 2020. 3. ～ 2020. 11.

❍ 계약금액 : 350,000천원

❍ 계약상대자: 단야공영㈜ 대표 김은숙

❍ 공사규모

- 진출입시설: 데크보수 118㎡, 조류방지망 483㎡, 철재면 도장 130㎡, 오일스텐 도장 1,610㎡, 가드레일정비 150경간 등

- 피아노물길 석재판 보수 15㎡

□ 실정보고 사유

❍ 관련근거

- 난지적환장 폐기물수송 진입로 확충계획 방침(환경수질과-3709)

❍ 검토내용: 폐기물수송 전용 진출입로 포장 공사시행

- 도로포장 B=5.5m, L=280m

- 과속방지턱, 반사경, 안전표지판 등 안전시설

❍ 위치도 및 현황사진

위치도(서울시 경계 고양시 측)	현황사진

❍ 공사비 변경 검토

-  주요수량 변경현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증.감
토공	터파기, 절토 등	㎥	-	1,427	+1,427
포장	아스콘	a	-	12.6	+ 12.6
도로경계석	150×150×1000	m	-	564	+ 564

- 공사비 증․감 내역

단위 : 천원

구 분	당 초	변 경	증 . 감	비고
직접공사비	-	108,331	증108,331
제 경 비	-	57,406	증 57,406
도급공사비	-	165,737	증165,737
관급자재비	-	72,158	증 72,158
총 공 사 비	-	237,895	증237,895

※ 적용단가 협의율=(낙찰율86.745%+100%)/2 = 93.372% 적용

□ 예    산: 237,895천원

❍ 소요예산: 운영부 환경수질과 예산 사용

□ 검토의견

❍ 운영부 환경수질과에서 한강공원에서 발생하는 폐기물수송 진출입로 확보를 위해 우리부서에 도로포장 요청하였으며, 발주처에서 시공사에게 설치 요구한 사항으로  협의율 = (낙찰율 86.745%+100%)/2 = 93.372% 적용으로 산출한 개략 공사비 237,895천원은 추후 설계변경에 반영함이 타당할 것으로 판단됨

□ 조치의견

❍ 폐기물수송 전용 진출입도로에 대하여 우선 공사시행하고 향후 설계변경(협의율 반영)시 반영하고자 함.

붙  임 : 1. 본부장 방침서 1부.

2. 적환장도로 협의율 공문서 1부.  끝.