투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(준공) - 서울교 보수공사

2020년도 예산사업으로 추진한 “서울교 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 서울교 보수공사

2. 공사개요

- 교면방수 및 아스콘포장 21.40a, 중분대표면처리 118.1㎡ 등

3. 공사기간 : 2020.4.26 ~ 2020.11.24

4. 계약금액 : 금491,381,000(금사억구천일백삼십팔만일천원정)

5. 계 약 자 : 송림건설(주) 대표 조동현

6. 변경사유 : 공종별 물량 증·감 및 제경비 실정산에 따른 계약금액 조정

7. 예산과목 : 안전총괄실 안전총괄과, 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비및부대비, 시설비

8. 설계변경 내역                                                   (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증・감
총 공 사 비		525,436,500	543,177,730	증) 17,741,230
도급비	공 급 가 액	423.124,091	446,710,000	증) 23,585,909
	부가 가치세	42,312,409	44,671,000	증) 2,358,591
	계	465,436,500	491,381,000	증) 25,944,500
관 급 비		40,000,000	34,559,610	감) 5,440,390
이 전 비		20,000,000	17,237,120	감) 2,762,880

붙임:  1. 설계변경 방침 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 제비율 및 산업안전보건관리비 검증 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	윤동원		시설보수과장	11/09 류태용
협조자
시행	시설보수과-7408	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개