문서번호	기반시설과-4308
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
안기정		라철흠	11/09 전영주
협조

2020년 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역 설계변경 및 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

한강사업본부

(기반시설과)

2020 한강공원 수경시설(분수)

저수조 청소용역 설계변경 및 정산 보고

2020 한강공원 수경시설 저수조 청소용역이 완료 됨에 따라 설계변경 사항이 발생 하였기에 보고드림

□ 용역목적

한강공원 내 분수 저수조 청소를 청소전문업체에 위탁하여 효율적, 체계적인 유지관리 및 철저한 수질관리로 이용시민에게 쾌적하고 깨끗한 공원이용 환경을 제공

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2020 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역

❍ 용역기간 : 2020.04.24. ~ 2020.11.15.

❍ 도 급 자 : *******************

❍ 계약금액 : ***********

❍ 용역대상 : 5개소(난지 거울분수, 뚝섬 음악⸳벽천⸳조형물분수, 이촌 벽천분수)

구 분	규 모 (B×L×H)	바닥면적 산출	바닥면적 (㎡)	개소
뚝섬 음악분수	Ø30m × 2m	3.14×152=	706.5	1
뚝섬 벽천분수	154m × 2m	(154×2)÷2(월2회)=	154	1
뚝섬 조형물분수	Ø6m × 3m	(3.14×32)÷4(월1회)=	7.07	1
이촌 벽천분수	12m × 2.8m	[{(3.14×42)-(3.14×32)} /4]÷4(월1회)=	1.37	1
난지거울분수	Ø17m×1.8m 114㎡×1.8m×6개	3.14×8.52= 114㎡×6개=	226.9 684.0	7
합 계			1,779.84	11

❍ 청소일정 : 28회(정기 27회, 수시 1회)

- 정기청소 : 주1회(뚝섬 벽천분수 월2회, 뚝섬 조형물분수/이촌 벽천분수 월1회) 청소

- 수시청소 : 홍수침수 및 수질부적합 등 청소 필요시

□ 변경사유 및 내용

❍ 정기청소 27회 완료

❍ 수시청소 사유 미발생 및 1회 미시행으로 계약금액 변경사유 발생

❍ 계약변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	증감액
계약금액	**********	**********	**********

□ 조치의견

❍ ‘20년 한강공원 분수 저수조 청소용역을 위와 같이 추진 완료하였기에 최종 설계변경(정산) 조치코자 하며, 계약 담당부서에 계약 변경토록 의뢰하고자 함.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 보험가입 완납증명서 1부.  끝.