문서번호	건축부-19003
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
남명준		조영수	11/10 이창구
협조	어르신정책팀장		민선희
	주무관		이병준

『시립송파 실버케어센터 건립공사』

설계용역 계약변경 검토보고

2020.11.

도시기반시설본부

건 축 부

『*****************

**************

****************************************************************************************

Ⅰ		용역현황

□ 용 역 명 : *********************

□ 위    치 : 송파구 가락동 481-2번지(가락종합사회복지관 내)

□ 규    모 : 지하2층/지상4층, 증축면적 4,969㎡

□ 주 용 도 : 노유자시설(노인복지시설)

□ 용 역 사 : ㈜디림건축사사무소

□ *************

□ ****************************

Ⅱ		추진경위

********************************************

********************************

**********************************************

*************************************

*******************************************

*******************************************

*************************************

Ⅲ		계약변경 검토

□ 관련근거

********************************************

******************************************

□ 변경내용

- 건축계획 변경

구 분	변경 전	변경 후	비 고
건축규모	지하1층, 지상4층	지하2층, 지상4층
입면계획	목재루버/콘크리트벽돌	알루미늄루버/점토벽돌
증축면적	4,656㎡	4,969㎡
용 적 률	127.09%	129.79%
굴착깊이	4.71m	8.31m

- *******

구 분	변경 전	변경 후	비 고
****	*********	*********	*********

- 과업내용 변경

구 분	변경 전	변경 후	비 고
인증	***********	**********
	**********	*********

*************

*************************************************************

*****************

**********************************

Ⅳ		처리의견

□ ************************************************************************************************************

Ⅴ		향후계획

************************

붙 임 : *******************