“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(숭인동 1257~ 178-89 외 13개소 장기사용 배급수관 정비공사)

1. 우리 사업소가 시행중인 『숭인동 1257~ 178-89 외 13개소 장기사용 배급수관 정비공사』 의 준공기한이 연기되어 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 숭인동 1257~ 178-89 외 13개소 장기사용 배급수관 정비공사

나. 계약업체 : *************

다. 계약금액 : ********************

라. 준공기한 연기

- 당 초 : 2020.04.27.~ 2020.12.01.

- 변 경 : 2019.04.27.~ 2020.12.21.

마. 귀책소재 : 중부수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 기상악화 및 대체구간 추가 작업지시에 따른 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기 방침 관련 1부.

2. 준공 연기원 및 요청서  각 1부. 끝.

							시설관리과장
주무관							천웅민			시설운영팀장					이유찬					시설관리과장					11/11 김상웅
협조자
시행			시설관리과-26591									(						)		접수											(						)
우	04605					서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과															/
전화		02-3146-2202						/전송			02-3146-2239					/	w.cheon@seoul.go.kr												/	부분공개(5)