문서번호	지식문화과-9297
결재일자	2020. 11. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	지식문화과장	서울도서관장
이혜영	박정추	11/11 이정수
협 조
	주무관		이승언

가칭)제2책보고 조성을 위한

기본구상 및 기본설계 용역 추진계획

2020. 11.

서울도서관

(지식문화과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

가칭)제2책보고 조성을 위한

기본구상 및 기본설계 용역 추진계획

고척스카이돔 지하 유휴공간을 활용한 책문화 기반 복합문화시설인「가칭)제2책보고」조성을 위한 기본구상 및 기본설계용역을 시행하고자 함

□ 추진배경

○ 서울책보고의 성공적 운영에 따라 문화소외지역을 대상으로 책문화 활성화를        위한 제2책보고 후보지 조사 추진 중 고척스카이돔 유휴공간 활용제안 검토

○ 문화소외지역인 서남권의 책문화 활성화에 기여하고 지역 랜드마크인        고척스카이돔의 이점을 활용하여 침체된 시립시설의 활성화, 사업비 절감 및        사업 추진기간 단축효과 기대

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 가칭)제2책보고 조성을 위한 기본구상 및 기본설계 용역

○ 용역기간 : 2020. 11. ~ 2.(계약일로부터 4개월)

****************************************

****************************************

○ 용역내용 : 고척스카이돔 지하1층 개보수(리모델링)

- 기본구상 : 대상지의 공간분석 및 디자인의 기본방향 정립

- 기본설계 : 기능에 따른 공간구획 및 배치계획안 구상

□ 주요 과업내용

○ 공간 내부 전면에 대한 구상 및 설계

- 천장, 벽체, 바닥의 마감, 기본조명, 기성 및 제작가구(서가), 붙박이 가구(서가) 등을 포함한 공간 전체에 대한 구상 및 설계 ※ 디자인포함

○ 공간 구성 시 콘텐츠를 고려

- 마감자재 선정, 가구, 전기, 통신, 소방, 정보통신실 등의 기본도면

작성 및 콘텐츠에따른 구축범위 제시

※ 콘텐츠에 대한 세부사항은 발주부서와 지속적 협의

□ 추진방법

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유

∘ 설계경험이 풍부한 전문업체와 신속한 계약 추진

∘ 추정가격 5천만원 이하인 용역계약(여성기업)

- 근    거 : 지방자치단체를당사자로하는 계약에관한법률 시행령

제25조의 마(여성기업)

**********************************

********************************

************************

□ 향후계획

○ 용역발주 및 계약 : ’20. 11.

○ 용역시행 : ’20. 11. ～ ’21. 2.(계약일로부터 4개월)

○ 실시설계 : ’21. 3. ~ 6.

○ 공사 : ’21. 7. ~ ’22. 1.

붙임  1. 과업내용서 및 설계용역비 산출서 1부.

2. 기술용역 타당성 심사결과 1부.  끝.