문서번호	현장민원과-14634
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	현장민원팀장	현장민원과장		중부수도사업소장
조재현	신창호	이강욱	김석정		11/12 박종진
협 조
	행정지원과장			김현숙

『중부수도사업소 수도계량기 교체공사』에 대한

설계변경 검토보고

2020. 11.

중부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

『중부수도사업소 수도계량기 교체공사』에 대한

설계변경 검토보고

『중부수도사업소 수도계량기 교체공사』에 대하여 계약물량 변경, 작업차량비 및 자재운반비 반영에 따른 설계변경 검토보고임.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 중부수도사업소 수도계량기 교체공사

❍ 교체대상 : 6,039개(15mm~50mm)

❍ ***************************************13.

❍ *******************

❍ 도급업체 **************

□ 추진경위

❍ ‘20. 04. 24. : 제293회 임시회 환경수자원위원회 사업추진 건의(송명화 의원)

❍ ‘20. 05. 27. : 수도계량기 교체공사 시행계획(본부 계측관리과)

╺ 각 사업소별로 교체공사 발주

❍ ‘20. 06. 03. : 일상감사의뢰(본부 계측관리과→ 감사위원회)

❍ ‘20. 07. 18. : 수도계량기 교체공사 시행(현장민원과)

❍ ‘20. 07. 31. : 계약체결(재무과)

❍ ‘20. 08. 13. : 행정재산 한시적 사용 승인(시설관리과)

╺ 공유재산 및 물품관리법 제20조(사용□수익허가) 동법 제24조(사용료의 감면)에 의거 무상사용

❍ ‘20. 10. 12. : 준공기한 연기(현장민원과)

╺ 준공기간 : 변경전 ‘20. 10. 26. → 변경후 ’20. 11. 13. (18일 연장)

╺ 사    유 : 자연재해(장마 및 태풍)와 코로나19로 인한 공사지연

❍ ‘20. 10. 27. : 실정사항 보고서 접수(도급자 → 현장민원과)

╺ 작업차량 사용비용 미반영분 요청

❍ ‘20. 11. 10. : 설계변경 심의소위원회 개최(현장민원과)

╺ 조건부 가결 : 원가계산 재검토 등 보완하여 설계변경에 반영조치

□ 설계변경 검토내용

❍ 설계변경 물량내역

공종	규격	단위	수량		금액 (원)
			변경전	변경후	변경전	변경후	증·감
수도계량기교체	15mm	개소	4,687	4,084	**********	**********	**********
	20mm	개소	450	354	*********	*********	**********
	25mm	개소	539	474	*********	*********	**********
	32mm	개소	156	129	*********	*********	********
	40mm	개소	149	114	*********	*********	********
	50mm	개소	59	43	*********	*********	********
작업차량비	1.0 DT 더블캡	개소	-	143	*	*********	*********
계							**********

❍ 설계변경 사유

╺ 현장여건 변경(기교체, 교체장애 등)에 따른 물량 감소

공종	수량 (개소)
	발주	교체	기교체	미교체(교체장애)
수도계량기 교체	6,039	5,198	398	443

• 기교체 : 계량기 이상 민원으로 교체 완료

※ 발주수량 파악 당시 이상계량기 교체가 지속적으로 발생되어 기교체된

물량으로 인해 실제 교체대상 수량은 발주량과 차이 발생

• 미교체(교체장애) : 폐전, 수용가측 교체거부, 밸브고장, 노후배관, 등

╺ 작업차량비(공사중 발생한 작업차량 사용비용) 누락분 반영

• 단가 산출은 『2020년 상수도공사 기본품셈단가표』 기준으로 적용함

• 산출된 단가는 1개소 단가(차량 한 대당 일일 작업차량비)임

╺ 자재운반비(3.5 DT 2대, 소형지게차 1대) 실비정산 반영

• 수도자재센터와 가설사무실(월곡배수지)간 설치용 수도계량기 운반비용임

❍ 변경내역

비 목		금액 (원)
		변경전	변경후	증·감액
재료비		*	*	*
노무비		**********	**********	***********
경비	산출경비	*	*********	*********
	산재보험료	*********	*********	********
	건강보험료	*********	*********	********
	산업안전보건관리비	*********	*********	**********
	연금보험료	*********	*********	********
	고용보험료	*******	*******	********
	퇴직공제부금	*********	*	**********
	노인장기보험료	*******	*******	*******
	기타경비	*********	*********	********
일반관리비		*********	*********	********
이윤		**********	**********	**********
소계		***********	***********	***********
부가가치세		**********	**********	**********
자재운반비		*	*******	*******
도급비		***********	***********	***********
관급자재비		***********	***********	***********
총공사비		***********	***********	***********

□ 검토의견

❍ 도급업체로부터 제출된 설계변경 사항이 설계변경 심의 소위원회 지적사항을 모두 반영조치되어 타당하다고 사료됨에 따라 변경 계약의뢰하고자 합니다.

□ 향후계획

❍ 2020. 11. : 공사준공 및 준공정산

❍ 미교체분에 대하여는 본부 계측관리과와 협의 후 추진

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 설계변경 요청서 1부(계약상대자).

4. 설계변경 심의 소위원회 결과보고 1부.  끝.