투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	서울교 보수공사 현장실정 보고에 대한 회신

1. 공사감독1처-7359(2020.11.3.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 『서울교 이상거동 보강공사』 현장실정보고 내용에 대하여 아래와 같이 회신하오니 사업시행이 원활하게 진행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울교 이상거동 보강공사

나. 회신내용

1) 미끄럼방지스토퍼 용접길이 조정(ㄷ형 → ㄱ형)

2) 비계형식을 현장실정에 맞도록 변경 시행하고 통행자의 안전을 위해 분진막 설치

3) 가설기자재의 안전성 확보를 위해 품질시험 시행

4) 사업시행에 철저를 기하고 향후 낙찰차액 활용 설계변경 시행.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	11/12 류태용
협조자
시행	시설보수과-7525	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개