문서번호	급수운영과-19020
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원재		김승완	11/12 이병운
협조
	주무관		서순란

단수계획 보고

(************)

2020. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

급수운영과-18798(2020.11.10.)호와 관련, **************노후관 교체공사로 인한 단수계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2020년 신공덕동외 6개동 상수도공사

❍ 공사개요 : 상수도관 교체(D500, L=4m) 및 분기밸브 설치(D300)

❍ 공사위치 : *****************

❍ 공사일시 : 2020.11.13.(금) 22:00 ~ 11.14.(토) 05:00

□ 수계현황

❍ 급수수계 : 와우산배수지

❍ 시설용량 : 40천톤/일

❍ 표    고 : L.W.L(60m)~H.W.L(66.5m)

❍ 급수계통도

뚝도정수센터	⇨	와우산배수지	⇨	와우산2 중블록

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : ****************(단수계획서 참조)

❍ 단수세대 : ****

❍ 관로제원 : ******************

❍ 수    압 : 약 4.3㎏/㎠(표고 21m)

❍ 단수일시

- 2020.11.13.(금) 22:00 ~ 11.14.(토) 05:00

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 5시간

- 관 절단 및 부설(3시간) + 밸브접합(1시간) + 퇴수 및 통수(1시간)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 소화전을 이용 밸브 조절전 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 공사 완료후 충분한 관세척(소화전 이용)후 수질검사 실시

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

- 제수밸브 및 퇴수밸브 조절 : 단수계획서 참조

****

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임 : 단수계획서(단수안내문) 1부.  끝.