문서번호	설비부-17669
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	11/12 이달영

『동부간선도로 확장(2공구) 통신공사』

라디오재방송설비 실정보고 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(2공구) 통신공사』

라디오재방송설비 실정보고 검토보고

『동부간선도로 확장(2공구) 공사』관련, 라디오재방송설비 현장여건 반영을 위한 실정보고 내용을 검토하고 보고드림

1		계약현황

❍ 물 품 명 : 도봉지하차도 라디오재방송설비 구매 설치

❍ 계약기간 : 2020.02.12. ~ 2020.12.31.

❍ 계약금액 : 311백만원

❍ 계 약 사 : 중앙통신 주식회사

❍ 감 리 단 : ㈜이산

2		검토내용

관련근거

❍ 라디오재방송설비 실정보고[동부2감-20-653호(2020.11.09.)]

실정보고 주요내용

❍ 변경사유

-『도로터널 방재시설 설치 및 관리지침』에 의거 비상방송설비와 재방송설비는 상호 연동하여 DMB 방송에서도 비상방송이 동시에 송출되도록 구성하여야 함에 따라, TDMB 비상방송장비 반영

- 소화전 간격 조정에 따른 증설(6개소)로 무선방송스피커 추가 반영

- 발주 누락분(동축케이블) 반영

❍ 개략 소요예산                                           (단위: 천원)

품 목	당 초	변 경	증 감	비 고
라디오재방송설비	311,405	393,569	증) 82,164

실정보고 세부내용

❍ 주요자재 변경내용

품 명	단 위	당 초	변 경	증 감	변경사유
TDMB 비상방송설비	*************
TDMB 비상방송 주장치	대	0	1	증 1	- 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침에 따른 DMB설비 반영
TDMB 송신기	대	0	2	증 2
보조장비 전원케이블	EA	0	3	증 3
2. 무선방송스피커설비	************
비상방송 무선스피커	대	70	72	증 2	- 소화전 증설에 따른 수량 조정
무선스피커 전원케이블	EA	0	72	증 72
3. 동축케이블 및 부속자재	************
동축케이블 클램프	개	0	1,900	증 1,900	- 발주 누락분 반영
동축케이블 커넥터(12D)	개	0	94	증 94
동축케이블 커넥터(22D)	개	0	30	증 30
셋트앙카	EA	0	1,900	증 1,900

❍ 적용단가 검토

- 신규비목 : 물가자료 및 견적서의 최소단가 × 낙찰률 적용(80.589%)

- 기존비목 : 계약단가 적용

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침과 현장여건을 반영한 실정보고를 검토한 결과 수량 및 신규단가 적용 등 적정하게 산출되었음.

3		검토의견

보고자 검토의견

❍ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 총무부에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.