투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공정계획 및 도장공 시공확인 방안 승인 통보)

1. 업무지시현장 : 성산대교 남단 성능개선공사(장기1차) 주식회사 도화엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2020-11-13 18:11:37

3. 지 시 내 용

가. 성산퇴계(건)2020-612호(2020.10.30.)와 관련입니다.

나. 「성산대교 남단 성능개선공사」의 공정계획 점검결과에 대한 검토결과 준공 기한은 3개월 연장하되, 5차 공사는 12월에 준공하고 연장하는 기간은 6차로 계약하여 시행,

다. 아울러 가교철거에 대한 공정계획을 별도로 검토하여 보고하여 주시고 특히 월드컵대교 직결램프와 간섭되는 부분에 대하여 면밀하게 검토 하여 주시기 바랍니다.

라. 도장공 시공확인 방안에 대하여도 승인하오니 조사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  방침서 1부.    끝.

주무관							최승룡			터널건설과장					11/13 최진우
협조자
시행			토목부-22050									(						)		접수											(						)
우	04809					중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2567						/전송			02-3708-2599					/	csy21@seoul.go.kr												/	대시민공개