문서번호	설비부-17723
결재일자	2020. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	11/13 代여인웅
협조

서울광역푸드뱅크센터 이전 건립 기계설비공사

냉난방기 추가구매 검토 보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

서울광역푸드뱅크센터 이전 건립 기계설비공사

냉난방기 추가구매 검토 보고

광역푸드뱅크센터 이전 건립, 기계설비공사 냉난방기 추가구매에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

○ 공 사 명: 서울광역푸드뱅크센터 이전 건립 기계설비공사

○ 위   치: 성동구 송정동 74-7 (중랑물재생센터 부지 내)

○ 규   모: 지상2층, 연면적 985.27㎡

○ 기   간: 2019.12.09.~ 2020.12.30.

2		검토내용

○ 추가위치: 2층 남/녀 휴게실, 1층 작업실

○ 추가사유: 기 설치된 냉난방기 이설을 검토하였으나 내용년수(9년)가 경과되었고, 당초 발주 물량에서 누락되어 있음.

○ 추가물량: 전기히트펌프(실외기) 1대, 천장형1way(실내기) 3대

○ 소요금액: 금9,224,000원

○ 구매방법: 조달구매(다수공급자계약)

3		조치계획

◯ 남/녀휴게실과 작업실에 냉난방기를 추가 설치하여 주 사용자인 노동자의 편안한 휴식공간과 쾌적한 근무공간을 제공하고자 함.  끝.