투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사)

1. 설비부-17777(2020.11.16.)호와 관련입니다.

2.『중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업』전기분야 소요 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기내용

건 명	계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약금액	납 품 기 한
				당 초	변 경
************** ***************	*********** ******************	******	***********	***********	***********
*************** ************	*********** ******************	***********	***********	***********	***********

나. 연기사유 : 선행공종 지연에 따른 관급자재 납품기한 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 1. 관급자재 납품기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서(2건) 각 1부.   끝.

	설비부장
주무관	이창근		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	11/16 이달영
협조자
시행	설비부-17866	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-2660	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	부분공개(5)