문서번호	설비부-17777
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	11/16 이달영
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

관급자재 납품기한 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 추진 중인『중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사』에 소요되는 관급자재인 태양광가로등 외 1종이 토목공사 공사기간 연장에 따라 당초 계약된 납품기한 내 반입이 불가하여 아래와 같이 연기 조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

**********************************

***************************

************************************

***************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 중랑물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(412,000㎥/일)에 따른 전기공사 1식

공사기간 : 2017. 11. 24. ~ 2020. 11. 30.

도 급 비 : *******************************

도 급 자 : ***************

감 리 자 : *********

Ⅲ
		관급자재 납품기한 연기

관급자재 계약현황

계 약 명	계 약 자	납품요구번호	계약금액	계약기간
******	******	****************	***********	*********** *************
***	********	****************	***********	*********** *************

납품기한 연기

〇 연기사유

⇨ 중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업 시행 중 선행 공종인 토목공사의 공기연장에 따라 후속 공정인 전기공사 준공기한을 ‘20년 12월말까지 연기 예정인 바, 관급자재 설치 시기 미도래하여 납품기한 연기가 불가피함

〇 납품기한 연기

계 약 명	계 약 자	구분	계약금액	계약기간
******	******	**	***********	*********** *************
		**	***********	*********** *************
***	********	**	***********	*********** *************
		**	***********	*********** *************

〇 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ
		조 치 계 획

건설사업관리단의 제출서류 검토 결과 선행공정 지연에 따른 관급자재 납품기한 연장이 필요하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 동 계약 건에 대하여 납품기한을 2020년 12월 31일까지 연기 의뢰하고자 함

붙임 : *****************************************

*************************** 1부.

붙임 : *******************************************

*************************** 1부.      끝.