문서번호	설비부-17760
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영화		이종근	11/16 이달영
협조

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(총차7회,8차2회) 시행 보고

2020. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(총차7회,8차2회) 시행 보고

본 공사관련하여 *********************************************************************************************

******************************************************

****************************************************

1		공사개요

□  공사명: 동부간선도확장(2공구) 전기공사

○ 규모: 녹천교~상계주공 11단지 간(3.2㎞) 도로확장(4차로→6차로)

- 수전설비: 6,500kVA, 가로등: 169본, 터널등: 1,891등(도봉지하차도 2,980m)

○ 공사비: 15,389백만원(도급: 11,135, 관급: 4,008, 이전: 246)

○ 감리사: ㈜이산

○ ***********

○ 계약금액

(단위: 원)

구분	계약금액	준공(기성)금액	공사기간	비고
**	***************	*************	**********************
***	************	***********	**********************	**
**	************	**********	**********************	**
**	************	**	**********************	****
**	***********	***********	**********************	**
**	************	***	**********************	****
**	***********	**	*********************	****
**	**************	**************	*********************	**
**	*************	*************	*********************	**

2		검토내용

□  관련근거

○ ‘설계변경(실정보고 5,6차) 검토 보고’(설비부-16280호, ‘20.10.22.)

○ ‘동부간선도로확장(2공구) 전기공사(설계변경) 계약심사 결과 통보’

(계약심사과-16550호, ‘20.10.27.)

○ ‘설계변경(총차7회,8차2회) 계약금액 조정 검토보고’(이산2020-6379호, ‘20.11.10)

□  계약금액 변경

○ 계약심사 결과 반영

(단위: 천원)

구분	요청금액	심사금액	증〮 감	비고
******	**********	**********	**********	************

○ 설계변경 금액

(단위: 천원)

구분	당초	변경	증〮 감	비고
******	**********	**********	***********
			***********
******		**********
	**********

□  설계변경 사유(총차)

구분	변경사유	공사비 증〮 감	비고
공사비	****************** *************	************	9차 공사 발주
	********************** *********************************	************	8차(2회) 설계변경
	********************** ************	************
합계		*************

□  설계변경 주요내용

(단위: 천원)

변경내용	상세내용	공사비			비고
		당초	변경	증〮 감
도봉어르신 문화센터 증축 (기존1층→5층)	동력 및 전력간선 1식 전열,전등설비 1식 유도등,자동화재탐지 등 소방전기 1식	0	828,667	** 828,667	실정보고5차
시설공단 요청사항	- 터널등기구 표찰 신설 (1,788개)	1,215,222	1,236,810	** 21,588
관급자재 구매계획 변경 (관급→도급)	- 진입차단막 설비	21,105	171,359	** 150,254
	- 비상조명등 (LED 2/4W 94개 외)	1,313,884	1,333,833	*) 19,949
기계설비 용량증설	- 집수정펌프 용량증설에 따른 전력설비 변경 (HFCO 1C 185㎟ 6,920m 신설 외)	1,231,922	1,583,399	** 351,477	실정보고6차
합계				** 1,371,935

3		검토결과

□  건설사업관리단 검토의견

○ 총차(7회), 8차(2회)에 대한 설계변경 건을 검토한 결과 설계변경 도서는 계약심사과 심사결과 내용대로 적정하게 반영됨.

○ 시설공단 요청사항 외 3건은 8차(2회) 설계변경분에 반영하였으며,도봉어르신 문화센터 증축 건은 9차공사로 계약요청하고자 함.

□  보고자 의견

○ 동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 검토한 변경도서 내용이 적정한 것으로 판단되어 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임: 1. 책임건설사업관리단 검토보고서 1부 .

2. 설계변경 계약심사 결과서 1부. 끝.