문서번호	건축부-19313
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
이제관		박근우	11/16 이창구
협조

『평창동미술문화복합공간건립공사』

관급자재(레미콘) 사급 전환 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『평창동미술문화복합공간건립공사』

관급자재(레미콘) 사급 전환 검토보고

우리본부가 시행중인「평창동미술문화복합공간건립공사」관련하여 현장 여건을 반영한 “관급자재(레미콘) 사급 전환”에 대한 실정보고가 제출되어 검토 보고함

1		공사개요

○ 위    치 : 종로구 평창문화로 101

○ 규    모 : 지하1층/지상5층(건축물 3개동), 연면적 5,590.05㎡

*********************************************

○ 공사기간 : 2019.09.02 ~ 2021.10.31 (2차 : 2021.05.31)

○ 시 공 자 : 위일종합건설(주) 대표 박종기 외 2개사

○ 건설사업관리단 : (주)펨코엔지어링건축 대표 홍정선 외 2개사

2		실정보고 내용

○ 근 거

- 관급자재 레미콘 사급전환 검토 보고〔PPA제2020-445(’20.11.06.호)〕

- 공사용자재 직접구매 예외신청 결과 통보〔중소기업청 성장지원과-2138(’20.10.26.호)〕

○ 관련법규

- 공사계약 일반조건 제6절 공사설계의 변경 6. 소요자재의 수급방법 변경

- 공사계약 일반조건 제7절 1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

- 건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무수행 지침 제67조(설계변경 관리)

○ 사급전환 관급자재 물량

구 분	품 명	규 격	단위	적용단가	수 량	공급 변경
**** ******	***	*********	*	******	****	*****
	***	*********	*	******	***
	***	********	*	******	**
*					*****

○ 사급 전환 사유

**************************************

**************************************************

********************************

**********************************

3		계약변경 내용

○ 단가 산출 검토

- 신규비목 협의율 적용

**************************************************

**********************************

○ 공사비 증·감 검토

(단위:원)

*****		*****	*****	*****
** ******	***	*	***********	***************
	*****		**********	***************
	****	*	***********	***************
**********		***********	*	***************
****		***********	***********	***************

4		건설사업관리단 검토의견

○ 당현장 레미콘 수급 사정이 어려워 공정지연 예방을 위하여 사급변경이 불가피하다고 사료됨

5		처리의견

○ 책임건설사업관리기술자의 검토의견에 따라 실정보고 승인.

○ 원할한 공정관리를 위하여 승인사항은 현장에 반영·시공토록 우선 조치

○ 추후 관련절차에 의거 설계변경 시, 금액 확정(추후, 설계변경 자문 절차 등에 따라 변동 될 수 있음을 통지)

붙임 : 1. 실정보고[관급자재(레미콘) 사급자재 전환]  검토 보고 1부.

2. 공사용자재 직접구매 예외신청 결과 공문 1부.

3. 사급전환 레미콘 단가적용 비교표 1부. 끝.