문서번호	시설보수과-9503
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		오재영	11/17 김영철
협조

『욱천고개2구간 외 5개소 정밀안전점검용역』

준공기한 연기 검토 보고

2020. 11.

서부도로사업소

시설보수과

『욱천복개2구간 외 5개소 정밀안전점검 용역』

준공기한 연기 검토 보고

우리 사업소에서 시행하는「욱천복개2구간 외 5개소 정밀안전점검 용역」과 관련하여 용역사의 준공기한 연기 요청에 따른 검토 보고임.

용역개요

○ 용 역 명 : 욱천복개2구간 외 5개소 정밀안전점검 용역

○ 용역기간 : 2020. 3. 30. ~ 2020. 11. 24.

○ 용 역 비 : 178,260천원

○ 용 역 사 : ㈜백산엔지니어링 대표 이정호

주요 추진경위

○ 2020. 02. 14. : 용역발주

○ 2020. 03. 30. : 용역착수

○ 2020. 07. 13. : 제1회 설계변경(서소문고가차도 과업 추가)

○ 2020. 10. 21. : 중간보고

준공기한 연기 보고

○ 관련근거 : 과업기간 연장 요청의 건

☞ ㈜백산엔지니어링 20-114호(‘20. 11. 12.)

○ 연기사유

- 본 정밀안전점검 용역 준공기한은 ‘20.11.24.이나, 장마기간 욱천복개2구간 용역 수행(현장조사) 불가 및 서소문고가차도 정밀안전점검 과업 추가로 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기 요청함

○ 준공기한 연기

(당초) : 2020. 03. 30. ~ 2020. 11. 24.

(변경) : 2020. 03. 30. ~ 2020. 12. 29.

○ 귀책사유 : 기상조건(천재지변) 및 서소문고가차도 정밀안전점검 과업 추가에 따른 과업기간 연장으로 발주처 귀책사유에 해당됨.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

○ 상기 보고 내용과 같이 일부 복개구간 및 서소문고가차도 정밀안전점검을 위한 과업기간 추가가 필요한 실정이므로,

○ 보고서 내용 보완을 통한 정확한 시설물 상태 평가를 위하여 준공기한 연기 조치하고자 함.

향후계획

○ 2020. 11월 중 : 변경계약 체결(준공기한 연기)

○ 2020. 12월 중 : 용역준공

붙임 : 용역사 공문 1부.  끝.