실정보고 검토서

공사명

퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편공사

공사개요

· 위 치 : 퇴계로2가~광희동사거리

· 규 모 : 보행환경 개선 L=1.5km

· 공사기간 : ‘19.08.~‘20.11.

· 도 급 비 : 3,851백만원

· 시공사 : ㈜광혁건설

· 감리단 : ㈜이산

· 설계사 : ㈜서우TEC

실정보고 건명

자전거 도로폭 확대에 따른 미끄럼방지재 실정보고

실정보고

사유

- 당초 자전거 도로가 폭 1.2m로 설계되어있으나, 보행정책과 및

자전거 정책과 합동점검시 1.6m로 변경 요청

보도상 설치되는 자전거 도로확장에 따른 차도상 설치되는 폭도 확장 함에 따라 미끄럼 방지재 포장 수량증가 필요

건설사업관리단

검토의견

- 자전거 정책과 의견(서울형 자전거 도로 설치기준 준수)에 따른

자전거 도로폭 확대(미끄럼방지)는 타당한 것으로 판단됨.

공기에 미치는 영향

0 개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	1*****	******	******
관급비	45*********	62*********	*************

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

특이사항 없음

발주처

검토의견

건설사업 관리단의 검토의견이 타당하여 승인조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

비 고

서울형 자전더 도로 설치기준: 자전거도로폭은 1.5m 이상으로 하며, 부득이한 경우 1.2m로 할 수 있다.

결재

담당

노순재

과장

장종환

부장

11/17

김용제