문서번호	현장민원과-17459
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	현장민원과장	강서수도사업소장
서주태	추경민	11/17 정진일

- 수도계량기 교체공사 -

설계변경(정산) 시행계획

2020. 11.

강서수도사업소

(현장민원과)

- 수도계량기 교체공사 -

설계변경(정산) 시행계획

우리사업소에서 시행한 재질불량 수도계량기 교체공사와 관련하여

시공물량 변경 및 제경비 등 실사용에 따른 정산을 시행하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강서수도사업소 관내 수도계량기 교체공사

○ 계약금액 : 금198,553,500원

○ 계 약 일 : 2020. 7. 22.

○ 공사기간 : 2020. 7. 29. ~ 2020. 11. 15.

○ 계 약 자 : ㈜전흥건설  대표 박보영

□ 설계변경(정산) 사유

▸지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

▸ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제77호)

- 입찰 및 계약 집행기준 제8절(보험료 사후정산 등)

- 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경)

○ 설계변경(정산) 근거

○ 설계변경(정산) 사유

- 공사현장 여건에 따른 물량 변경

- 4대보험료·제경비 등 실사용에 따른 정산

□ 설계변경(정산) 내용

○ 주요 물량증·감 내역

(단위 : 개)

공 종	계량기 구경
	구분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm
계량기 교체	당초	9,069	7,938	150	360	432	189
	변경	8,845	7,774	134	337	420	180
	증·감	감)224	감)164	감)16	감)23	감)12	감)9

- 당초 교체대상 9,069개 중 공사발주 후 폐전철거, 고장교체 등으로 교체물량 33개 감소

‣ 교체대상 9,036개 중 8,845개 교체(97.9%) 완료

‣ 옥내배관 노후, 장애물적치, 수용가 부재 등 교체장애로 191개 미교체

⇒ 향후 미교체 계량기는 장애요인 제거 후 자체교체 예정

- 교체물량 감소 내역

(단위 : 개)

구분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm
계	224	164	16	23	12	9
폐전철거 등	33	27	-	3	2	1
교체장애	191	137	16	20	10	8

‣교체장애수전 191개(옥배배관 노후 131, 장애물 적치 58, 수용가 부재 2)

○ 제경비 등 실사용에 따른 정산

항 목	금 액(원)		증 ․ 감
	당 초	변 경(최종)
산 재 보 험 료	4,464,914	4,347,848	감)117,065
건 강 보 험 료	4,215,494	3,362,820	감)852,674
연 금 보 험 료	5,688,072	2,872,800	감)2,815,272
고 용 보 험 료	1,041,414	1,014,109	감)27,305
퇴직공제부금	2,907,237	-	감)2,907,237
노인장기보험료	432,088	335,480	감)96,608
산업안전보건관리비	2,927,461	2,830,000	감)97,461

- 4대보험료 등 정산

구 분		금 액(원)		증 ․ 감
		당 초	변 경(최종)
도급비	계	198,553,500	184,833,000	감)13,720,500
	공급가액	180,503,182	168,030,000	감)12,473,182
	부가가치세	18,050,318	16,803,000	감)1,247,318

□ 설계변경 금액

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경계약 추진

- 상기 설계변경 건에 대하여 우리사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최

하여 심의결과에 따라 설계변경 계약을 추진코자 함

붙임  1. 설계변경내역서 1부

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.