문서번호	토목부-22218
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	11/17 김용제
협조

도로 부속시설물 설치에 대한 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

2020. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

도로 부속시설물 설치에 대한 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

서울로7017 하부 구간 자전거도로 조성을 위한 차선 조정으로 건너편 보도가 일부 축소되어, 보도구간의 설치된 와이어 휀스를 철거 후 재설치가 필요하여 검토 보고 드림.

*********************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 보행정책과-13142(´20.10.06.) : 교통안전시설 심의 결과 알림

○ 세종수 제2020-97호(´20.10.22.) : 와이어휀스 설치건에 대한 검토 보고

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(2구역)

○ 위    치 : 서울역 교차로~시청 교차로

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2020. 12. 31.

○ 도 급 비 : 6,154백만원

○ 시 공 사 : 키움건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 세종대로 도로공간 재편사업 구간의 자전거도로 설치가 추가로 결정되어 2구역 1-2단계 구간인 서울로7017 하부(연세대학교 세브란스 빌딩 앞)의 자전거 도로 조성을 위한 차선 조정으로 건너편 보도가 일부 축소되었으며,

○ 축소되는 보도구간의 기설치된 와이어 휀스를 철거 후 재설치가 필요함.

(기설치된 와이어휀스의 노후화 및 연세대학교 세브란스 빌딩 앞)

○ 와이어휀스 설치 위치도 및 사진

○ 단면도 및 상세도

○ 공사비 현황

(금액단위 : 원)

구 분	규격	단위	수량	금액	비고
********	***********	*	****	**********
*****				**********
*****				*********
*******				**********
*****				*********
*****				**********

*******************************************

Ⅳ		조 치 의 견

○ 도로에 자전거도로 설치시 기존 차로 유지를 위한 보도축소가 불가피하며, 공사시 저촉되는 와이어휀스 교체 설치는 보고 내용과 같이 적정하므로 추후 설계변경을 시행하여 내역에 반영하고자 함.

붙임  1. 보행정책과 공문 1부.

2. 건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.