문서번호	체육정책과-12615
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	장애인체육팀장	체육정책과장
손경이	양윤희	11/17 이창현

산악문화체험센터 전시·체험시설 설치공사(암장) 설계변경 검토보고

2020. 11.

관광체육국

(체육정책과)

산악문화체험센터 전시·체험시설 설치공사(암장)

설계변경 검토보고

산악문화체험센터 암장공사 과업내용에「점검통로 설치」작업이 추가되어 설계변경을 추진하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 산악문화체험센터 전시·체험시설 설치공사(암장)

○ 계 약 자 : ㈜다우조경(대표 김규정)

○ 공사내용 : 실내·외 리드, 실내볼더링장 설치

○ 공사기간 : ’20.10.8.~’20.12.26.

○ 공사금액 : ************

□ 설계변경

○ 설계변경 사유 : 점검통로 설치

- 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안 발의(임오경 의원)로「신고 체육시설업」에 실내·외 인공암벽장업 추가 예정

※ ’20. 7. 3. 발의 / ’20. 9. 24. 문화체육관광위원회 안건 통과

- 향후 인공암벽장업체는 체육지도사 자격증 보유 전문강사 배치, 시설기준 준수 및 안전관리 점검을 받아야 하므로 반드시 암장 점검통로 설치 필요

○ 설계변경 내용

- 변경총액 : 금750,197,000원(증 금30,381,300원)

(단위:원)

구 분	공 사 비			비 고
	당초	변경	증감
총공사비	***********	***********	**********
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	*********

***********************************

- 신규공정 : 인공암벽 점검로, 점검사다리, 점검창호 신규 설치 및

점검통로 설치에 따른 시공물량 증가

- 가격산정 : 설계변경 당시 기준, 산정한 단가의 낙찰율 87.708% 적용

(단위 : 원)

비 목		변경 전	변경 후	증감액
합 계		***********	***********	**********
재료비	SMC 등반벽_실외등반벽	***********	***********	*
	합판 등반벽_실내리드	**********	**********	*
	합판 등반벽_실내볼더링	***********	***********	*
	점검로 및 점검사다리 설치	*	*********	*********
	점검창호 설치	*	*********	*********
노무비	직접+간접노무비	***********	***********	**********
경비	4대 보험 등	**********	**********	*********
일반관리비		**********	**********	*********
이윤		**********	**********	*********
부가가치세		**********	**********	*********

○ 예산과목

- 관광체육국 체육정책과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 산악문화체험센터 건립, 시설비(401-01)

□ 조치의견

○ 변경사항에 대하여 설계변경을 시행하고 향후 재무과에 설계변경 계약 의뢰하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 암장 점검로 도면 1부.

3. 합의각서 1부.