문서번호	교량안전과-16988
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
박상홍		강천수	11/17 하현석
협조

- 한강교량보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리 - 건설사업관리기술단 인원투입 조정 현황 보고 검토

2020. 11월

안전총괄실

(교량안전과)

- 한강교량보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리 -

건설사업관리기술단 인원투입 조정 현황 보고 검토

『한강교량 보수·보강 공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역』수행중 원활한 준공처리를 위해 상주 건설사업관리자 인원투입 조정을 위한 검토 보고

※ 분야별 건설사업관리기술자 변경승인 요청<한강교량감 2020-459<'20.11.6)>

□ 관련근거

○「건설기술진흥법 시행령」제60조(건설사업관리기술인의 배치)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 한강교량보수보강공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

○ 계약기간 : ’20.01.06.∼’22.12.31.(1차 : ’20.01.06.∼’20.12.31.)

○ 계약금액 : 2,629,600천원 (1차 : 880,000천원)

○ 용 역 사 : (주)동명기술공단, (주)천일, (주)경동엔지니어링

□ 요청 내용(인원투입 조정)

○ 투입인원 조정 현황(2020년)

구분		등급	2020년(당초)													2020년(변경)													조정 사유
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	개월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	개월
토목	책임기술자 김현태 (총괄)	특급 P Q													12	1/6투입												11.90	실투입(기승인)
	박상길 (1공구)	고급 P Q													8			3/16투입										9.54	실투입 및 1공구 준공기한까지 투입 기간 조정
	기병문 (2공구)	고급 P Q													8				4/16투입(이영재)									8.50	실투입 및 2공구 준공기한까지 투입 기간 조정
																						7/1변경투입(기병문)
	정용희 (동작,천호,행주)	중급													12	1/6투입												11.90	실투입(기승인)
	황수명 (한남,영동)	초급													8					5/25투입								7.22	실투입(기승인)
	손동화 [도장(부)]	초급													4							7/6투입						5.90	실투입 및 준공기한까지 투입 기간 조정[도장분야 업무 수행으로 투입 전 협의 완료]
도장	김창호 [도장(정)]	중급													4				4/28투입(김인화)									8.13	실투입 및 원활한 도장보수공사 건설사업관리업무 수행을 위하여 투입 인원 일원화로 조정 [투입 전 협의 완료]
																				5/25변경투입(박승찬)
																						7/1변경투입(김창호)
	분야별기술자	중급													4													-
계			60.00개월													63.09개월

- 조정사유 : 원활한 준공처리를 위해 준공기간까지 투입기간 조정

○ 투입인원 조정에 따른 수량 및 용역비 증·감 현황

(단위 : 원, VAT포함)

구 분		상주기술자	제경비	용 역 금 액		비 고
전체분	당초	159.00인·월	68.55%	2,629,600,000	증・감	• 제경비 조정 사유 당초 내역서 수량 오기로 상주기술자 등급별 인·월 수량에 환산계수(고급)가 잘못 적용되어 삭제 - 계약금액 변동 없이 제경비율을 조정하여 반영 조치
	변경	179.88인·월	59.45%	2,629,600,000	- (변동 없음)
1차분	당초	54.11인·월	68.55%	880,000,000	증・감
	변경	63.09인·월	59.45%	880,000,000	- (변동 없음)

- 조정사유 : 계약금액 변경없이 제경비율 조정하여 반영

□ 검토의견

○ 본 건은 장기계속 사업으로 추진중인 한강교량 유지관리를 위해 감독권한 대행 및 건설사업관리 용역의 전체(3년차)중 1차분으로 대부분 11월말로 투입 종료토록 되어 있으나,

○ 현장사업 마무리 및 설계변경 검토 등 내업을 위해 12월말까지 투입되어야할 실정으로 원활한 업무(1차분)를 위하여 투입 인원 조정은 타당 하다고 사료되며,

○ 투입인원 증가에 따른 용역비는 제경비를 조정하여 도급액 증·감없이  시행하고자 하며, 21년도 및 잔여분에 대해서도 1차분 조정처럼 아래와 같이 일부 조정하여 시행하고자 함.

- 2차분(2021년) 인원투입 조정 계획

(단위 : 개월)

구 분		토 목						도 장		비 고
		책임기술자	분야별기술자					분야별기술자
		특급	초급(토목+도장)	고급1	고급2	초급	중급1	중급1	중급2
2021년 (2차분)	당초	12.00	4.00	8.00	8.00	6.00	12.00	4.00	4.00
	변경	10.00	5.00	9.53	9.53	-	12.00	8.00	-
	증·감	-2.00	1.00	1.53	1.53	-6.00	-	4.00	-4.00
조정내용		•동절기 철수(특급) •초급에 철수 개월수 전용 및 장래분으로 이월		•초급 투입 삭제 •고급(2인)에 삭제 개월수 전용 및 장래분으로 이월			변동없음	투입인원 일원화로 근무기간 연속되게 함

□ 조치계획

○ 상기 검토의견과 같이 건설사업관리기술자의 투입인원 변경이 사업마무리 및 준공처리를 위해 타당하다고 사료 되어,

○ 용역사인 동명기술공단에 승인통보하여 감독업무 대행 등 건설사업관리 업무수행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1) 관련공문(건설사업관단 인원투입 조정 현황보고) 1부. 끝.