투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약변경 시행(총차·2차) 및 계약 의뢰 (서울 운현궁 보수공사)

1. 건축부-19225(2020. 11. 13.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인「서울 운현궁 보수공사」에 대한 변경계약(총차·2차)을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울 운현궁 보수공사 (장기계속)

**********************************************

다. 공사기간(2차) : 2020. 8. 14 ~ 2021. 1. 31 (총차 : 2019. 8. 1 ~ 2021. 1. 31)

라. 계 약 자 : 희우건설(주), 유한회사 서림문화재

마. 계약변경 내용(총차 및 2차)                                      (단위:원)

구 분		변경 전	변경 후	증 감
계약금액	총차	***********	***********	**************
	2차	***********	**********	**************
공사기간	총차	2019. 8. 1.~ 2021. 1. 31.	2019. 8. 1.~ 2021. 1. 31.	변경 없음
	2차	2020. 8. 14.~ 2021. 1. 31.	2020. 8. 14.~ 2021. 1. 31.	변경 없음

바. 주요 변경사유 : 문화재 자문의견, 예비준공검사 지적사항 반영 등

사. 예산과목

: 건축부, 역사문화유산의 계승 발전, 문화재 보존 복원, 국가지정문화재 보수, 시설비 및 부대비, 시설비 (예산편성부서 : 문화본부 역사문화재과)

붙임 : 1. 계약변경(2차1회·총차3회) 시행 검토보고

2. (감리자, 시공사) 설계변경 계약요청 관련서류

3. 계약금액 조정 검증확인서 및 합의각서.  끝.

	건축부장
주무관	이승현		문화시설과장	박근우		건축부장	11/13 이창구
협조자	재무예산과장	代김미경
시행	건축부-19282	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 13층, 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2632	/전송	3708-2659	/	lshyun26@seoul.go.kr	/	부분공개(5)