투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「여의도한강공원 파크골프장 복구공사」준공기한 연장에 따른 변경계약 요청

1. 공원여가과-4365(2020.11.16.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 ｢여의도한강공원 파크골프장 복구공사｣와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연장하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 여의도한강공원 파크골프장 복구공사

2) 공사기간 : 2020. 10. 19. ~ 2020. 11. 17.

3) 도 급 비 : *************

4) 도급업체 :*************

나. 준공기한 연장

구 분	공 사 기 간	도 급 비	비 고
당 초	2020. 10. 19. ~ 2020. 11. 17.	변동없음
변 경	2020. 10. 19. ~ 2020. 11. 19.

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

1) 귀책소재 : 한강사업본부

2) 지체상금 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 공문(별첨) 1부.

2. 합의각서 등 각1부.  끝.

	공원여가과장
주무관	박지해		공원여가과장	11/16 강계표
협조자
시행	공원여가과-4365	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0871	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(5)